문서번호	청소행정과-46277
결재일자	2022.11.29
공개여부	비공개(5,7)
방침번호

주무관		청소작업팀장		청소행정과장		복지국장
정반야		김부수		정헌욱		11/29
						김경선
협조
	재무과장		김영규
	계약팀장		홍혜영

2022년 공공처리시설 반입불가 폐기물 운송용역 설계 변경 계획

2022년 공공처리시설 반입불가 폐기물 운송용역 설계 변경 계획

2022. 11.

(청소행정과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 ☑ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2022년 공공처리시설

반입불가 폐기물 운송용역 설계 변경 계획

2022년 공공처리시설 반입불가 폐기물 운송 물량이 증가하여 당초 계약금액 대비 사업비 증가에 따른 변경 계약을 시행하고자 함

Ⅰ		추진근거

청소행정과-35152호(2021. 12. 9.)

○ 2021년도 공공처리시설 반입불가 폐기물 운송용역 추진계획

청소행정과-23959호(2022. 8. 5.)

○ 2022년도 공공처리시설 반입불가 폐기물 운송용역 계약(단가) 변경 계획

Ⅱ		계약개요

계약건명: 2022년 공공처리시설 반입불가 폐기물 운송용역

계약업체: ㈜나라환경산업  (대표: 김장미, 심재경)

계약기간: 착수일 ~ 2022. 12. 31.

계약물량: 10,500톤

계약금액: 금685,186,000원(금육억팔천오백일십팔만육천원)

예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리,

민간이전, 민간위탁금(307-05)

Ⅲ		설계변경 내역

구분	변경전	변경후	비고
계약금액	685,186,000원	714,077,000원	증28,891,000원
운송물량	10,500톤	10,850톤	증350톤
계약기간	착수일 ~ 2022. 12. 31.	착수일 ~ 2023. 1. 31.	1달 연장

Ⅳ		변경사유

반입불가폐기물, 봉제원단 등 폐기물 운송 물량 증가

※ 2022. 10월말 기준 9,176톤 운반

처리물량 증가에 따른 계약금액 증가

Ⅴ		소요예산

총 소요예산

○ 공공처리시설 반입불가 폐기물 운반비: 28,891,000원

- 350톤 × 82,547원 ≒ 28,891,000원

예산과목

○ 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리

민간이전, 민간위탁금(307-05)

Ⅵ		행정사항

일상감사의뢰  ---------------------- 감사담당관

변경계약체결  ------------------------- 재무과

붙임  설계변경내역서 1부.  끝.