문서번호	도시철도계획부-9797
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
이민호		강명석	11/27 정대현
협조
	주무관		안창호

「위례선 도시철도 기본계획 수립 용역」

설계변경 검토 보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

「위례선 도시철도 기본계획 수립 용역」

설계변경 검토 보고

「위례선 도시철도 기본계획 수립 용역」과 관련하여 추가 과업(입찰안내서 작성 등)에 따른 설계변경에 대해 검토  보고 드림.

1		근 거

□ 위례선 도시철도 기본계획 수립 용역 착수('18.8.13)

□ 위례선 도시철도 기본계획 수립 용역 설계변경('19.12.11.)

□ 용역 설계변경 검토 보고(도시철도계획부-4500, '20.5.25.)

□ 용역 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고(도시철도계획부-9063, '20.11.3.)

2		용역개요

□ 용 역 명 : 위례선 도시철도 기본계획 수립 용역

□ 용역기간 : 2019. 8. 13.~2020. 12. 31.

□ 용역금액 : 819,894천원

□ 용역업체 : 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소 외 8개사       □ 과업내용

○ 사업위치 : 마천역~복정역, 우남지선

○ 사업규모 : 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

□ 추진현황

○ '19.08.13. : 용역 착수

○ '19.12.11. : 용역 변경 계약(과업 추가)

○ '20.06.23. : 기본계획 승인 신청

○ '20.10.29. : 기본계획 승인(대광위)

3		검토사항

******************************************

******************************************************************

***************************

*******************************************

****************************

**************************

**********************************************************************************************************************

*****************************************************************

**************************************

**************************

4		검토결과

□ 용역금액 변경

*************************************

*************

****	***	***	***
****	*********	*********	********

□ 예산과목 (교통사업특별회계)

○ 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금), 광역철도 건설사업, 위례선 도시철도 건설, 시설비

5		행정사항

□ 변경계약에 대한 합의각서 작성(용역사)

□ 변경계약 의뢰(→총무부)

붙임  1. 과업내용서(변경) 및 설계변경 내역서 1부.

2. 관련 보고서 각 1부.  끝.