아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	다목적 인명구조 훈련장 설치공사 (건축,전기,감리) 계약 기간 변경 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-24928(2022. 11. 29.)"다목적 인명구조 훈련장 설치공사 설계변경(2차) 계획"

나. 재난관리과-24929(2022. 11. 29.)"다목적 인며구조훈련장 공사 진행 사항 실태보고(3차)"

2. 우리서 주요사업인 다목적 인명구조훈련장 설치공사 건축, 전기, 감리에 대한 공사를 추진하고 있는 바 화물연대 파업, 우천, 자재변경, 민원접수 등으로 인하여 다음과 같이 계약기간 변경을 알려 드립니다.

붙임  1. 공사변경계약서(2차 건축) 1부.

2. 공사변경계약서(2차 전기) 1부.

3. 용역변경계약서(감리용역) 1부.  끝.

	노 원 소 방 서 장
수신자	(주)모두엔지니어링, (주)산성건축사무소, (주)용상전기통신
담당자	김평숙		구조팀장	한기응		재난관리과장	11/29
최흥식
협조자
시행	재난관리과-24954	(	2022.11.29	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 재난관리과 3층	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6859	/전송	02-971-5118	/	kps2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)