문서번호	치수안전과-7073
결재일자	2022. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수관리팀장	치수안전과장
이원호	양해선	11/29
		손경철
협 조

신월 빗물저류배수시설 모니터링 및 유출지하수 관리계획 용역

준공기한 연기 계획 보고

2022. 11.

물순환안전국

(치수안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

신월 빗물저류배수시설 모니터링 및 유출지하수 관리계획 용역

준공기한 연기 계획 보고

신월 빗물저류배수시설 모니터링 및 유출지하수 관리계획 용역 준공기한 연기 계획에 대해 보고드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 신월 빗물저류배수시설 모니터링 및 유출지하수 관리계획 용역

○ 용역기간 : 2021.8.4. ~ 2022.11.30.

○ 용 역 비 : ******

○ 계 약 자 : ****************************

○ 과업내용 : 신월 빗물저류배수시설 모니터링 및 유출지하수 관리계획 수립

Ⅱ		추진경위

○ ’21. 8. : 용역 착수

○ ’21.10. : 착수보고회 및 자문회의 개최

○ ’22. 3. : 실정보고

○ ’22. 4. : 용역 중간보고회(자문포함)

○ ’22. 5. : 유출지하수 활용시설 등 설치를 위한 저류터널 내 현장답사

○ ’22. 7. : 용역 준공기한 연기(’22.8.3. → ’22.11.30.)

Ⅲ		준공기한 연기 계획

○ 준공기한 연기내역

**	**	**	**
****	***********************	***********************	****
****	******	******	****

○ 준공기한 연기사유

- ****************************************************************

○ **********

Ⅳ		향후계획

○ ’22.11. : 계약변경 의뢰(치수안전과→재무과)

○ ’22.12. : 최종 보고회

○ ’22.12. : 용역 준공

붙임 : 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.