문서번호	설비부-33252
결재일자	2022. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
강민우		김현기	11/30
			김중영
협조
	주무관		이지영

『광역소공인특화지원센터 건립 설비공사』

준공기한 변경(연장) 검토보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『광역소공인특화지원센터 건립 설비공사』

준공기한 변경(연장) 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『광역소공인특화지원센터 건립 설비공사』와 관련

건설사업관리단이 제출한 준공기한 변경(연장) 보고에 대하여 검토보고 드림

1		관련근거

ㅇ 설비분야 준공기한 변경(연장) 검토보고 : 광역 CM-0504호, 0506호, 0507호('22.11.30.)

ㅇ 건축공사 계약변경 검토보고 : 건축부-33521호('22.11.25.)

2		공사개요

ㅇ 사 업 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 설비공사(전기, 통신, 소방)

ㅇ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎡

ㅇ 계약현황

구분	차수	계약금액(원)	계약기간	계약업체
전 기	총 차	***********	*********************	****** ********
	2 차	***********	*********************
통 신	총 차	***********	*********************	********
	2 차	***********	*********************
소 방	총 차	***********	*********************	******* *******
	2 차	***********	*********************

※ 기계공사는 건축공사에 포함하여 발주

ㅇ 건설사업관리단 : 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소

3		검토내용

ㅇ 준공기한 변경(연장) 사유

- 선행공정인 건축공사 공기 연장*************************에 따른 설비분야(전기, 통신, 소방) 준공기한 연장

ㅇ 계약기간 변경

구분	차수	계약기간		비고
		당초	변경
전 기	총 차	*********************	*********************	*****
	2 차	*********************	*********************	*****
통 신	총 차	*********************	*********************	*****
	2 차	*********************	*********************	*****
소 방	총 차	*********************	*********************	*****
	2 차	*********************	*********************	*****

※ 계약금액(총차, 2차) 변경 없음

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정(건축공사) 준공기한 연장에 따라 후속공정인 설비분야 준공기한을 연장함이 적정하다고 사료됨

4		조치계획

ㅇ 건설사업관리단이 검토의견이 타당하므로 계약부서(총무부)에 준공기한 변경을 위한 변경계약(총차, 2차) 의뢰하고자 함

붙임  1. 설비분야 준공기한 연장요청 검토보고(감리단) 각 1부.

2. 건축공사 계약변경 검토보고 1부.  끝.