아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	화물연대 파업에 따른 공공하수처리시설 운영관리 기준 준수 예외기간 변경 협의 요청

1. 관련 문서

가. 한강유역환경청 수질총량관리과-13110(2022.9.23.)호

나. 한강유역환경청 수질총량관리과-14168(2022.10.17.)호

2. 우리 센터 총인처리공사가 '22.11.24.부터 화물연대 총파업에 따른 레미콘 수급 지연으로 중단되어 부득이하게 수질유예 기간에 맞춰 공사를 진행할 수 없게 되었습니다.

3. 이에 11월 30일부터 받은 수질유예 기간을 연기하고자 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

○ 당초 : '22.11.30.~12.09., 12.20.~12.24., '22.12.30.~'23.1.14.,

1.25.~1.29., 2.15.~2.19.

○ 변경 : 현 시점에서 준수예외 기간 예측 불가

4. 향후 공사가 정상적으로 재개될 경우 신속히 수질유예 기간을 재 협의 요청하도록 하겠습니다.

붙임  1. 화물연대본부 성명서 1부.

2. 예정공정표(화물연대 파업 표기) 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	송종봉		주무관	조정호		운영과장	11/30
김봉철
협조자
시행	운영과-22277	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8523	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)