문서번호	주거환경개선과-3900
결재일자	2022. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경개선4팀장	주거환경개선과장
민봄이	代문미주	11/30
		오장환

해방촌 도시재생활성화계획 변경 보고

2022. 11.

주택정책실

(주거환경개선과)

해방촌 도시재생활성화계획(경미한사항) 변경 보고

해방촌 도시재생활성화사업의 마중물사업이 연내 완료됨에 따라, 그 간 도시재생사업 실행 이력을 현행화하여 당초 활성화계획을 변경하고자 함

1		추진개요

□ 추진배경

○ 해방촌 도시재생사업 실행 과정에서 사업추진 여건 및 사업 실행력을 고려한 활성화계획 조정 필요

○ 마중물사업 (국비 지원)과 지자체 연계사업 (시비 등)에 대한 활성화계획 (사업비 등)을 현행화하여 변경절차 이행

□ 추진근거

○ 도시재생활성화 및 지원에관한법률 제20조(도시재생활성화계획의 확정 및 승인)

○ 도시재생활성화 및 지원에관한법률 시행령 제26조(경미한 사항)

- 도시재생활성화계획에 대한 총사업비 변동없음 또는 10%미만 감액

- 도시재생활성화계획에 대한 세부사업의 사업비가 20% 이내 변경

※ 변경 절차

▸ 경미한 사항  ※ 약1개월 소요

변경(안)제출 (서울시→LH)	➠	검토결과 회신 (LH→서울시)	➠	국토부 협의 (서울시→국토부)	➠	변경사항 확정 (국토부→서울시)	➠	변경 고시

▸ 경미한 사항(세부사업 20%이상 변경) ※ 약3개월 소요

변경(안) 제 출 (서울시→LH)	➠	검토결과 회 신 (LH→서울시)	➠	국토부 협의 (서울시→국토부)	➠	실현가능성 /타당성 평가	➠	변경사항 확 정 (국토부→서울시)	➠	변경 고시

※ 중대한 사항 : 공청회, 지방의회 의견청취, 행정기관협의 등 (9개월 이상 소요)

2		추진경과

○ '17.05.11 : 해방촌 도시재생 활성화계획 고시 (서울시 고시 제2017-164호)

○ '20.04.23 : 해방촌 도시재생 활성화계획(변경) 고시 (서울시 고시 제2020-163호)

○ '20.12.17 : 해방촌 도시재생 활성화계획(변경) 고시 (서울시 고시 제2020-3635호)

○ '22.03.17 : 해방촌 도시재생 활성화계획(변경) 고시 (서울시 고시 제2022-3768호)

○ '22.10.~11. : 해방촌 도시재생 활성화계획(변경) LH 검토

3		변경계획(안)

【 주요 변경내용 】

- 사 업 비 :*************************************

- 사업기간 :**********************************

□ 마중물 사업

○ 변경내역

단위사업		사업비(백만원)			사업기간		검토결과
		변경 전	변경 후	증감	변경 전	변경 후
1.주민역량 강화지원		***	***	******	*********	************	*****
2.마을공동체 규약 마련		***	**	*****	*********	*	*****
3.주민공동이용시설 조성		*****	*****	*	*********	*
4.신흥시장 활성화		*****	*****	*******	*********	*	*****
5.공방/니트산업 특성화 지원		***	***	*****	*********	*	*****
6.해방촌테마가로 조성		*****	*****	******	*********	*	*****
7.안전한 생활환경 조성		*****	*****	*******	*********	*	*****
	범죄예방 디자인 개발	**	**	*****
	골목길 보행환경개선사업	***	***	*******
	범죄예방안전시설 설치	***	***	*****
8.녹색마을 만들기 지원		*****	*****	******	*********	*	*****
	녹색골목길 디자인 개발	**	**	*****
	녹색골목길 조성사업	*****	*****	******
	옥상전망대 조성사업	**	**	*****
합 계		******	******	-

○ 변경사유

- 주민역량강화 지원

사 업 비	*************************** ******************************** ****************************
사업기간	********************************* *********************************************

- 마을공동체 규약 마련

사 업 비	************************** *********************************** ******************************

- 신흥시장 활성화

사 업 비	****************************** **************************************** ******************************** *******************************

- 공방/니트산업 특성화 지원

사 업 비	*************************** ************************************ ****************************************** **************************************

- 해방촌 테마가로 조성

사 업 비	***************************** *********************** *****************************

- 안전한 생활환경 조성

사 업 비	***************************** ******************************* ************************************* ************************************

- 녹색마을 만들기 지원

사 업 비	***************************** *************************** ******************************* ****************************

□ 연계사업

○ 변경내역

단위 및 세부사업	사업비(백만원)			사업기간		검토결과
	변경 전	변경 후	증감	변경 전	변경 후
a.주택가 공동주차장 건설(복합화)	*****	*****		*********	*
b.군인아파트 활용	******			******
c.공공목적 시설물 간판개선	**	**		***	*
d.신흥시장, 예술이 되다	*****	*****	******	*********	*	*****
e.서울형 장기안심상가	**************			*********	*
k.공중선 정비	***	***		*********	*
f.리모델링지원형 장기안심주택	**************			*********	*
g.노후포장도로 정비공사	***	***		*********	*
h.하수관로 유지관리	*****	***	******	*********	*	*****
I.주택 슬레이트지붕 교체·개량	**************			*********	*
j.학교화장실 개선사업	***	***		*********	*
합 계	*****	*****	******

○ 변경사유

- 신흥시장, 예술이 되다

사 업 비	****************************** **************************************** ******************************** *******************************

- 하수관로 유지관리

사업기간	**************************** *************************

4		향후계획

○ '22.11.30.	: **********************

○ '22.12.	: ***********

○ '23. 1.~ 2.	: *****************

붙임 : 1. 해방촌 도시재생활성화계획 총괄표 1부.

2. 해방촌 도시재생활성화계획 변경 요청서(안) 1부.

해방촌 도시재생활성화계획 총괄표

구 분	단위사업		사업비(백만원)			사업기간		검토결과
			변경 전	변경 후	증감	변경 전	변경 후
마중물사업	***********		***	***	*****	*********	************	*****
	*************		***	**	****	*********	*	*****
	*************		*****	*****	*	********	*
	**********		*****	*****	******	*********	*	*****
	****************		***	***	****	*********	*	*****
	************		*****	*****	*****	*********	*	*****
	*************		*****	*****	******	*********	*	*****
		***********	**	**	****
		************	***	***	******
		***********	***	***	****
	*************		*****	*****	*****	*********	*	*****
		************	**	**	****
		**********	*****	*****	*****
		**********	**	**	****
	*******		******	******
연계사업	*******************		*****	*****		*********	*
	**********		******			******
	***************		**	**		***	*
	**************		*****	*****	******	*********	*	*****
	************		**************			*********	*
	****************		**************			*********	*
	*************		***	***		*********	*
	***********		*****	***	******	*********	*	*****
	*****************		**************			*********	*
	************		***	***		*********	*
	********		***	***		*********	*
	*******		*****	*****	*****
합 계(①+②)			******	******	*****