아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 대 공 원
수신	내부결재
(경유)
제목	서울랜드 노후 송수관로 교체공사 설계변경(1회) 지출품의 시행

시설과-27821호(2022. 11. 29.)호와 관련하여 우리 대공원에서 시행중인 ‘서울랜드 노후 송수관로 교체공사’를 아래와 같이 설계변경(제1회)하여 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울랜드 노후 송수관로 교체공사

나. 공사기간 : 2022. 10. 13. ~ 2023. 2. 13.

다. 계약업체 : 승민건설(주) 대표 최수진

라. 변경금액

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
도급비	공급가액	283,833,255원	320,859,581원	증)37,026,326원
	부가가치세	28,383,325원	32,085,958원	증)3,702,633원
	계	312,216,580원	352,945,540원	증)40,728,960원

마. 낙찰차액 사용내역

※ 낙찰차액 88,410,610원을 활용 설계변경 필요예산 40,728,960원 확보

- 서울랜드 노후 송수관로 교체공사 낙찰차액 사용

예산과목	발주금액[A]	계약금액[B]	낙찰차액[A-B]	설계변경 증액
서울랜드 노후 송수관로 교체공사	401,150,000원	312,216,580원	88,410,610원	사용)40,728,960원

바. 설계변경사유 : 변경내역(실정보고서 내용 반영)

사. 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경
관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1) 방침서 1부

2) 합의각서 1부. 끝.

주무관	송용현		시설과장	전결 11/30
문석기
협조자	주무관	천미영
시행	시설과-27842	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원 관리부 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7422	/전송	02-507-7230	/	hyun1406@seoul.go.kr	/	부분공개(6)