문서번호	설비부-33260
결재일자	2022. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		代임현철	11/30
			김중영
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』 지열시스템 변경(정산) 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

지열시스템 변경(정산) 검토보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

지열시스템 변경(정산) 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』관급자재인 지열시스템과 관련하여, 남품 처리 전 정산처리하고자 검토보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422㎡ (청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
기계설비공사	(주)거람 외 2개사	총차	2020.06.29.~2022.12.14.	1,079,831,300
		2차	2021.09.15.~2022.12.14.	1,048,625,300

○ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정 외 1개사

Ⅱ		관련근거

○ 지열시스템 제작설치 계약금액 변경요청 검토보고

[시립CM 제2022-481호(2022.11.30.)]

Ⅲ		검토내용

○ 계약현황

계약건명	계약자	계약기간	계약금액(원)
지열시스템	주식회사 제이엔지	2021.07.19.~2022.12.14.	151,700,000

○ 변경사유

- 보험료, 산업안전보건관리비 등 사후정산 항목에 대하여 납품 전 정산처리

○ 정산내역

항 목	변경 전	변경 후	증·감	비고
건강보험료	1,173,606	-	-1,173,606
연금보험료	1,583,576	-	-1,583,576
노인장기요양보험료	120,294	-	-120,294
산업안전보건관리비	1,588,411	-	-1,588,411
환경보전비	199,793	-	-199,793
소계	4,665,680	-	-4,665,680
부가가치세	466,568	-	-466,568
합계	5,132,248	-	5,133,000	천 단위 절사

○ 계약금액 변경내용

항 목	변경 전	변경 후	증·감	비고
재료비	96,933,752	96,933,752	-
노무비	34,963,614	34,963,614	-
경비	6,011,725	1,346,045	-4,665,680
소계	137,909,091	133,243,411	-4,665,680
부가가치세	13,790,910	13,324,342	-466,568
합계	151,700,000	146,567,000	-5,133,000	천단위 절사

○ 건설사업관리기술단 검토의견

- 상기 내용을 검토한 결과 정산 변경 내역이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리단의 설계변경(정산) 검토의견이 적정하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 설계변경 검토보고 1부.  끝.