문서번호	공원운영과-5771
결재일자	2022. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	중부공원여가센터소장
김근혁	박종환	이인수	12/01
			하재호
협 조

「남산청사 노후 창호 교체공사」 설계변경 시행 계획 보고

2022. 12.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「남산청사 노후 창호 교체공사」

설계변경 시행 계획 보고

창호 정비를 위해 시행 중인「남산청사 노후 창호 교체공사」와 관련하여 추가 공사 발생, 실측 물량변경이 발생함에 따라 설계변경 검토 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 관급자재(창호, 방충망) 물량변경 검토보고 [공원운영과-4377, 22.11.8.]

□ 현장 실정보고서 제출에 따른 검토보고 [공원운영과-4961, 22.11.17.]

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 남산청사 노후 창호 교체공사

□ 공사위치 : 남산별관 청사 (서울특별시 중구 삼일대로 231)

□ 공사내용 : 노후 창호 170개소 및 유리 등 교체공사

□ 공사기간 : 22. 10. 4. ~ 12. 22. ※ 공정률 95% (11.30.기준)

□ 편성예산 : ********** ※22년 하반기 2차 추경 예산

□ 계약금액 : ***********

**********************************

□ 추진경위

ㅇ `22. 8. 23. ~ `22. 8. 26. : 사업 방침 수립 및 설계 시행

ㅇ `22. 8. 25. ~ `22. 9. 1. : 관급자재 납품업체 선정 및 발주

ㅇ `22. 9. 14. ~ `22. 10. 4. : 도급공사 발주

ㅇ `22. 11. 17. : 현장 실정 사항 보고서 검토

- 현장 실정에 따른 물량 감소 및 신규 공정 추가

Ⅲ		보고내용

□ 설계변경사유 : 신규 공종 발생 및 시공물량 증·감 발생

ㅇ 현장 실정 보고 결과에 따라 신규(추가) 공종 발생

ㅇ 현장 실정에 따른 시공물량 증·감 내역(관급자재 물량감소 등) 반영

- 세부내역은 붙임1 공종별 설계변경 내역서 참고

□ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분		공 사 금 액			비 고
		당 초	변 경	증·감
총 공 사 비		*******	*******	**********
도급비	공급가액	*******	*******	**********
	부가가치세	******	******	*********
	소 계	*******	*******	**********
관급자재비		*******	*******	*********

ㅇ 계약심사(설계변경) 심의 여부 : 제외

※ 설계변경 계약심사대상은 계약금액(설계변경 전)이 20억 이상인 공사

- 행정안전부 예규 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제3장 제5절

ㅇ 제비율 검증 결과 : **

- 제비율 검증 상세내역은 붙임3 제경비 검증확인서 참고

ㅇ 예산현황

- 집행잔액(낙찰차액, 미집행액) : *********

(단위 : 천원)

예 산 액	예 산 현 황				집행잔액 (낙찰차액, 미집행액 포함)
	구 분	발주금액	계약금액	변경금액
530,000	계	*******	*******	*******	*******
	도 급 비	*******	*******	*******
	관 급 비	*******	*******	*******

□ 공사기간 : 공사 기간 연장 없이 준공기한 내 공사 완료

Ⅳ		보고자 검토의견

□ 현장 실정사항을 반영한 설계변경 내용으로 상기 보고내용대로 집행계약상대자와 변경계약을 체결하며,

□ 설계변경 증액 금액은 본 사업의 집행잔액을 활용코자 함

따로붙임  1. 공종별 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제경비 검증확인서 1부. 끝.