아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연장 의뢰[서울시네마테크 건립 통신공사(1차)]

우리 본부에서 시행 중인『서울시네마테크 건립 통신공사(1차)』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 연장내용

구 분	차 수	준공기한		계약금액	계약업체
		당초	변경(연장)
통 신	***	***********	***********	************	******

2. 계약금액 : 변동없음

3. 연기사유 : 선행공종(건축)이 지연됨에 따라 후속공종(전기) 준공기한 연장

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 방침서(준공기한 연장 검토보고) 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김봉수		환경설비과장	김현기		설비부장	12/01
김중영
협조자
시행	설비부-33438	(	2022.12.01	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2323	/전송	02-6438-2399	/	bongsu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)