문서번호	토목부-35298
결재일자	2022. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		代박희정	12/01
			하현석
협조
	주무관		박희정

설계변경 검토보고(1회)

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사 건설폐기물처리용역

2022. 11.

도시기반시설본부

(토    목    부)

설계변경 검토보고(1회)

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사 건설폐기물처리용역

"청계천~정릉천 자전거도로 연결공사" 사업계획 변경에 따라 용역기간 및 금액에 대한 설계변경 검토 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 토목부-34757(2022.11.23.) : "사업계획 변경 검토보고"

Ⅱ		용 역 개 요

****************************************

*************************************

*********************

**********************************

******************************

***********************

Ⅲ		변 경 내 용

○ 설계변경 요약                                           단위: 천원

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
*** ****	** **	*********** **********	*********** **********	*******
	** **	******	*******	*********

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
*****	*****톤	*****톤	********톤
****	***톤	***톤	******톤

○ 책임건설사업관리기술인 검토현황

- 수방기간(05.15~10.15.) 하천내 공사중지 등 절대공기 부족에 따른 토목공사 공사 기간 연장에 맞춰 폐기물처리용역 기간도 151일 연장코자하며,

- '22.6.8. 시행한 기술자문회의(포장방법 변경)의 결과를 반영하여 기존 5cm 절삭후 덧씌우기에서 반사균열 저감을 위한 15cm 깨기 후 재포장으로 변경됨에 따라 증가된 건설폐기물 처리물량을 반영코자함.

Ⅴ		사 업 비 검 토

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감	비 고
****	**********	***********	**********
*****	*********	**********	*********
****	**********	***********	**********

Ⅵ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 건설폐기물처리용역 설계변경에 대한 책임건설사업관리기술인의 검토보고는 타당한 것으로 판단되며 이를 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계변경 책임기술인 검토서(합의각서 첨부) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.