문서번호	설비부-33558
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		代임현철	12/02
			김중영
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』 설계변경(총차,2차) 검토보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』 설계변경(총차,2차) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경(총차,2차) 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사

□ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

□ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

□ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	*******	**	**************************	***********
		**	**************************	**********
		**	*************************	***********

□ ***********************************

2		관련근거

□ 운영자(서경대학교) 요청사항 반영 요청 [청소년정책과-15502('21.09.15.)]

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2. 공사 계약기간의 연장)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 (제7절 2. 물품 계약기간의 연장)

□ 건축공사 준공기한 연장 검토 보고 [건축부-32382호('22.11.07.)]

□ 통신공사 설계변경에 대한 검토 보고 [시립CM 제2022-489호('22.12.02.)]

3		검토내용

□ 설계변경 사유

○ 의뢰부서(청소년정책과) 및 운영자(서경대학교) 요청사항 반영

- 시립청소년 음악창작센터의 효율적인 운영을 위한 건축 실배치 변경에 따른 통신배관,배선 변경 필요

- 실별 보안을 위한 출입통제장치 추가설치 및 규격변경(카드인식 및 지문인식) 필요

- 건물 보안을 위한 옥외 및 실내 CCTV 추가 설치 및 관제 모니터 규격변경 필요

○ 미사용 보험료 및 퇴직공제부금비 정산 필요

○ 주요 변경내역

(단위: 천원)

공 종	변 경 내 용	변 경 사 유	변 경 금 액 (직 접 비)
******	******************	************************************	*************
******	***************	****************************************	*************
****** *****	***************	****************************************	*************
******	***************	****************************************	*************
******	******************** *************** ***************** ***************	************************************** *********************************************** ****************************************	*************
******	************** ************** ******************** ***************	************************************ ****************************************	*************
******	******************	**********************************	*************
*****			***********

************************

공 종	품 명	규 격	단 위	변경전	변경후	증 · 감
******	*****	*******	*	**	**	***
	********	***********	*	*	***	****
	*********	**************	*	*	*	**
	***	***********	*	*	*	**
	******	***************	*	*	***	****
	*******	***	**	*	**	***
	***	*****	**	*	*	**
	***	*****	**	*	*	**
	*****	****	**	**	**	**
******	***********	*******	*	*****	*****	****
	***********	*******	*	*****	*****	****
	***********	*********	*	**	**	***
	*****************	*********	*	**	**	***
	******	***********	*	**	**	***
	*****	*********	*	**	**	***
	*****	*********	*	**	**	***
	*********	*********	*	**	**	***
	*********	**********	*	**	**	***
	***	***********	*	**	**	***
	***	***********	*	**	**	**
	******	****************	*	*****	*****	****
	**********	*************	*	***	***	***
	**********	*************	*	***	***	****
	**********	*************	*	*****	*****	****
******	***********	*******	*	***	**	***
	***********	*******	*	**	***	***
	***********	*******	*	***	*	****
	***********	************	*	**	*	***

공 종	품 명	규 격	단 위	변경전	변경후	증 · 감
******	***********	*******	*	***	***	****
	***********	*******	*	***	***	***
	***********	*********	*	**	**	***
	***********	*********	*	**	**	**
	***********	*********	*	**	**	**
	*****************	*********	*	**	***	***
	*****************	*********	*	***	***	**
	*****************	*********	*	**	**	**
	******	***********	*	***	***	***
	*****	*********	*	**	**	***
	*****	*********	*	*	*	**
	*********	*********	*	***	***	***
	*********	**********	*	*	*	**
	******	*****************	*	***	***	***
	******	***************	*	******	******	******
	****	*************	*	**	**	**
	****	*****************	*	**	**	**
	**	***	*	**	**	**
	**	**	*	***	***	**
	****	*	****	***	***	**
	***	*******	**	*	**	***
	******	******	*	*	**	***
	******	******	*	*	**	***
	*******	*************	*	***	*	****
******	***********	*******	*	***	***	**
	***********	*******	*	***	***	***
	***********	*******	*	***	***	***
	***********	*********	*	**	**	**
	*****************	*********	*	***	***	***
	***	***********	*	**	**	**
	******	***************	*	*****	*****	****
	*******	******	*	*	*	**
	*****	************	*	*	*	**

공 종	품 명	규 격	단 위	변경전	변경후	증 · 감
****** ******	*****	*******	*	***	***	***
	*****	*******	*	***	***	***
	***********	*******	*	***	***	***
	***********	*********	*	**	**	**
	*****************	*********	*	**	**	**
	*********	**************	*	**	**	***
	*********	**************	*	**	**	**
	******	***********	*	**	**	**
	*****	*********	*	**	**	**
	*********	*********	*	**	**	**
	********	*******	*	*****	*****	***
	********	*******	*	***	***	***
	********	********	*	***	***	***
	*******	*******	*	**	**	**
	*******	***	**	**	**	***
	*******	****	**	*	**	***
	******	**	**	**	**	**
	******	******	*	*	**	***
	***	*******	**	*	*	**
******	***********	*******	*	*****	*****	**
	***********	*********	*	***	***	**
	*****************	*********	*	***	***	**
	******	********	*	***	***	**
	*****	*********	*	**	**	**
	*****	*********	*	**	**	**
	*********	***********	*	***	***	**
	***** *******	*********	*	*****	*****	***
	***	************	*	**	**	**
	***	*******	*	*	*	**
	***	***********	*	***	***	**
	*********	*****	**	***	***	**

□ 변경금액(총차)

(단위: 원)

****			*****	*****	***********
* * * * * *	* * *	*****	**********	**********	*********
		****	**********	**********	*********
	* * *	*****	***********	***********	**********
		*****	**********	**********	*********
		****	***********	***********	**********
	* *	****	******	******	*******
		*****	**********	**********	*********
		*****	*********	*********	*******
		*****	**********	*********	**********
		*****	**********	**********	**********
		*********	*********	*******	********
		*******	*********	*******	**********
		*********	**********	**********	*
		****	**********	**********	*********
		********	**********	**********	***********
**********			***********	***********	**********
*****			**********	**********	*********
********			**********	**********	*********
****			***********	***********	**********
*****			**********	**********	*********
**********			**********	**********	*
**********			**********	**********	*
**********			**********	**********	*
**********			*********	*********	*
*****			***********	***********	**********

*************************

(단위: 원)

****			*****	*****	***********
* * * * * *	* * *	*****	**********	**********	*********
		****	**********	**********	*********
	* * *	*****	***********	***********	**********
		*****	**********	**********	*********
		****	***********	***********	**********
	* *	****	******	******	*******
		*****	**********	**********	*********
		*****	*********	*********	*******
		*****	**********	*********	**********
		*****	**********	**********	**********
		*********	*********	*******	********
		*******	*********	*	**********
		*********	*********	*********	*
		****	**********	**********	*********
		********	**********	**********	***********
**********			***********	***********	**********
*****			**********	**********	*********
********			**********	**********	*********
****			***********	***********	**********
*****			**********	**********	*********
**********			**********	**********	*
**********			**********	**********	*
**********			**********	**********	*
**********			*********	*********	*
*****			***********	***********	**********

□ 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장

○ 변경사유 : 선행공종(건축) 준공기한 연장에 다른 후속공정(통신) 준공(납품)기한 연장

○ 변경내용

계약번호 (납품요구번호)	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공기한
					당초	변경
**************	****	*******	**	***********	***********	***********
			**	***********	***********	***********
*************	*****	******	**	***********	***********	***********
*************** ******************	******	*****	**	*********	***********	***********

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 건설사업관리기술인 검토의견

○ 설계변경 내용 검토결과 현장여건 및 운영자(서경대학교) 요청사항을 적정하게 반영하였으며, 변경내역서, 변경도면 및 미사용 보험료, 퇴직공제 부금비 정산 등이 적정한 것으로 판단되며,

○ 선행공종(건축) 준공기한 연장에 따른 공정에 맞춰 공사 및 관급자재 준공(납품)기한을 연장하는 것이 적정하다고 사료됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 통신공사 설계변경 및 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장에 대하여 계약부서 (총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 재비율 검증확인서 1부.

3. 선행공종(건축) 준공기한 연장 관련 문서 1부.  끝.