문서번호	시설과-27984
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장
정영권	12/02
	문석기
협 조

『서울대공원 캠핑장 건축물 시설개선 전기공사』 설계변경 검토 보고

2022. 12. 2.(금)

서 울 대 공 원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『서울대공원 캠핑장 건축물 시설개선 전기공사』 설계변경 검토 보고

「서울대공원 캠핑장 건축물 시설개선 전기공사」관련 감독업무 수행중 설계변경 사유가 발생하여 계약금액 조정사항에 대하여 검토하여 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 서울대공원 캠핑장 건축물 시설개선 전기공사

□ 공사위치 : 서울대공원 캠핑장 샤워동

□ 공사기간 : 2022. 9. 21. ~ 2022. 12. 14.

□ 내    용 : 캠핑장 샤워동 리모델링에 따른 배관배선 및 조명 등 교체

□ 계약금액 : *********************

□ 시공업체 : *******************

2		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 현장여건에 따른 물량변경 및 산업안전보건관리비 등 제경비 정산

□ 주요 물량 변경 내역

연번	품 명	규 격	단위	수량			금액(원)
				당초	변경	증감	당초	변경	증감
1	*****	********	*	*	*	**	*******	*	********
2	*****	********	*	**	**	**	*********	*********	*******
3	****************************	************	*	**	**	**	*********	*********	********
4	*****	******	**	**	**	*	*********	*********	*******
5	********	******	**	**	**	**	*********	*********	********
6	*******	**************	**	*	**	*	********	*******	******
7	*****	********	*	**	**	***	*******	*******	********
8	*****	********	*	**	**	**	*******	*******	*******
※ 타 세부사항은 설계변경내역서 참조

□ 보험료 및 제경비 정산

구분	변경전 금액	변경후 금액	증·감		비고
산재보험료	*******	*******	*	*****
고용보험료	*******	*******	*	*****
산업안전보건관리비	*******	*	*	*******
기타경비미사용	*********	*********	*	******

3		공사비 변경금액

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증 / 감		비고
총공사비		**********	**********	*	*******
도급비	공급가액	**********	**********	*	*******
	부가가치세	*********	*********	*	******
	소 계	**********	**********	*	*******

4		검토 및 처리의견

□ 시공사 요청에 따라 변경사항을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 설계변경하여 변경계약을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 설계변경 검증확인서 1부.  끝.