문서번호	기전과-31536
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/02
		김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사(신호)」

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사(신호)」

2022. 12. 2.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 강남구 테헤란로7길 22

□ 공사기간 : ****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ****	*******	*******	*********

Ⅱ		검토 내용

□ 규제심의 : 서울특별시경찰청 교통관리과-3265호('22.02.15.)

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경
공사기간	****************	****************

□ 변경사유 : 유관기관(한국전력공사, 한국전기안전공사) 협의 지연으로 인한 준공기한 연기 요청

Ⅲ		검토 의견

□ ************에서 시행하는 과학기술인 복지콤 플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담 공사 준공 기한 변경승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인 서류를 검토 한 바, 조건부 승인 처리 하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.  끝.