문서번호	정수과-26202
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		김경진	12/02
			정미선
협 조
	주무관			양은영
	주무관			권이삭

사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역(22년 1차수) 변경계약 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  12.  2.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

『사업장폐기물(무기성정수오니) 처리용역』

(2022년 1차수) 변경계약 계획 보고

『사업장폐기물 처리용역(장계계속 단가계약)』과 관련하여 회계년도 마감에 따라 차수별 물량 및 계약금액을 변경하고자 함.

□ 용역계약 현황

○ 계 약 명 : 뚝도아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역

○ 용역기간 : 2022. 6. 1. ~ 2023. 5. 31.

○ 계약업체

구 분	상 호	대표자	주 소
처리	********	***	***********************
	********	***	**********************
운반	******	***	**************************
	*******	***	*************************

○ 계약금액 : ***************

구 분	합계	2022년 (6.1.~12.31)	2023년 (1.1.~5.31)	비고
금 액(원)	*************	***********	***********
처리물량(톤)	******	*****	*****

※ 처리단가 :**********************************************************

□ 변경계약 내역

○ 변경사유 : 사업장폐기물 처리용역(2022. 6. 1. ~ 2022. 12. 31.) 1차수 계약종료에 따른 계약금액 및 물량 변경

○ 처리물량 변경 내역

구 분		당 초 (톤)	변 경 (톤)	증, 감	비 고
총용역물량(톤)		******	******	****
차수별	1차(2022)	*****	*****	******
	2차(2023)	*****	*****	******

○ 계약금액 변경 내역

구 분		당 초(원)	변 경(원)	증, 감	비 고
총계약부기금액(원)		*************	*************	변경없음
차수별	1차(2022)	***********	***********	***********
	2차(2023)	***********	***********	***********

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 행정사항

○ 1차수 계약 정산기간 변경

- 사 유 :

• 회계년도 마감으로 정산, 변경계약, 지출 등 행정절차에 필요한 기한이 촉박

• 12월 처리량의 약 1/4만 12월에 정산지급하므로 실처리량과 정산량의 차이발생으로 월보 등 통계관리 불편(12월 실제처리량과 정산량이 기준인 월보의 처리량이 상이)

- 1차수 정산기간 변경 내역

구 분	기 존	변 경
1차수 정산기간	매년 6. 1. ~ 12. 7.경	매년 6.1. ~ 11. 30.
정산방법	12월 7일경까지 발생된 처리비를 변경계약후 12월 중순에 지급, 이후 발생된 처리비는 다음해 1월 처리비와 함께 다음해 2월에 정산	11월분 처리비까지 정산하여 1차수계약 변경후 준공완료하고, 12월분은 익년 1월에 정산

○ 2022. 12. 6. : 변경계약 의뢰(행정관리과)

붙 임 : 1. 총차 및 1~2차 설계변경 내역서(안) 1부.

2. 합의서(안) 1부.  끝.