문서번호	토목부-35374
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		김동현	12/02
			하현석
협조
	주무관		박희정

설계변경 검토보고(전체7회, 2차2회)

세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2022. 12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

설계변경 검토보고(전체7회, 2차2회)

세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역

*******************************************************************

※ 당 초: `22.1.1~`22.12.31 → 변 경: `22.1.1~`23.05.31

Ⅰ		관 련 근 거

○ 토목부-34757(2022.11.23.) : "사업계획 변경 검토보고"

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 세종대로 도로공간 재편사업 외2개소 통합감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 규    모 : 세종대로 외 2개소 및 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

○ 용 역 비 : 1,927백만원(2차 : 310백만원)

○ 계약기간 : '20.6.22. ~ '22.12.31.(2차 : `22.1.1.~ `22.12.31.)

○ 용 역 사 : 수성엔지니어링(주) 외 1개사

Ⅲ		변 경 내 용

○ 설계변경 및 주요내용

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
*********** ******************* *********	****	********** **********	********** **********	*** ****
	***	***********	***********	************
*********** ******************* *********	****	********* **********	********* *********	*** ****
	***	*********	*********	** *********

※ 청계천로 자전거 전용도로 설치공사는 별도공사로 ‘21년 공사준공하여 변경사항 없음

○ 건설사업관리기술인 등 투입 현황

구분				전체	전회까지	금회(2차)	비 고
현장별	등급	분야
**** **** ****	**	**	**	*****	*****	*****
			**	*****	*****	*****
	**	**	**	*****	*****
			**	*****	*****
	**	**	**	****	****
			**	****	****
	**	**	**	*****	****	****
			**	*****	****	****
	**	**	**	*****	****	****
			**	*****	****	****
	**	**	**	*****	*****
			**	*****	*****
	**	**	**	****	****
			**	****	****
*****		****	**	*****	*****	*****
			**	*****	*****	*****
*****		****	**	*****	*****	*
			**	*****	*****	*

Ⅴ		조 치 계 획

○ "청계천~정릉천 자전거도로 연결공사" 관련 연결교량 우선시공에 따른 사업계획변경으로 인하여 ’23년 수방기간까지 시설공사를 연장하는 바, 건설기술인의 투입 계획을 조정한 용역기간 및 용역비를 설계변경 시행코자 함.

붙임 1. 설계변경 책임기술인 검토서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.