아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	2차 변경계약 및 3차 발주계약 의뢰(국회대로 2단계 1공구 건설폐기물처리용역)

우리 본부에서 시행 중인 「국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(2단계) 건설공사 1공구 건설폐기물처리용역」과 관련하여 설계변경(2차 2회)에 따른 변경계약 및 3차 발주 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계 약 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(2단계) 건설공사 1공구 건설폐기물 처리용역

2. 계약금액 : 2,672,990,000원(2차 700,000,000원)

3. 계약기간 : 2021.06.18.~ 2024.12.31.(2차 2022.01.01.~ 2022.12.31.)

4. 계 약 자 : (주)영흥산업환경(대표 김충환)

5. 변경계약 의뢰내역

구 분		당 초	변 경	증 · 감
계약 금액	총차	2,672,990,000원	2,672,990,000원	변경 없음
	2차	700,000,000원	850,000,000원	증 150,000,000원
계약 기간	총차	2021.06.18.~ 2024.12.31.	2021.06.18.~ 2024.12.31.	변경 없음
	2차	2022.01.01.~ 2022.12.31.	2022.01.01.~ 2022.12.07.	감 24일

-  변경사유 : 공정계획 변경에 따른 건설폐기물 수량 조정

6. 발주계약 의뢰내역

구 분	계약금액	계약기간	비고
3차	1,200,000,000원	2022.12.08.~2023.12.31.

7. 예산과목 : 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 국회대로 지하차도 및 상부 공원화, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 설계변경(2차 2회) 내역서 1부.

3. 발주(3차) 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	이시연		방재시설과장	최진우		방재시설부장	12/02
代최진우
협조자
시행	방재시설부-31135	(	2022.12.02	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)