아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전( 「가락119안전센터, 강남농수산물검사소 합동청사 건립공사 건설사업관리용역(장기1차)」착수 및 건설사업관리 운영계획 변경 승인 통보)

1.업무지시현장 : 가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립공사(장기1차)

(주)종합건축사사무소근정

2.작 성 일 자 : 2022-12-01 17:12:13

3.지 시 내 용

1. 관련: 근정 제2022-1378호(2022. 11.07.), 근정가감 제2022-08호(2022. 11. 30.).

2. 귀 사에서 용역 수행 중인 「가락119안전센터, 강남농수산물검사소 합동청사 건립공사 건설사업관리용역(장기1차)」의 착수 및 건설사업관리 운영계획 변경 요청과 관련하여 아래와 같이 승인함을 알려드립니다.

가. 승인 내용: 착수계, 건설사업관리 운영계획(변경1회) 승인

구 분		투입기간 변경 승인 내역		비 고
		당 초	변 경
분야별 건설 사업관리기술인	안전	2022. 12. 1.∼ 2024. 7. 31.	2023. 1. 1.∼ 2024. 8. 31.
	토목	2022. 12. 1.∼ 2024. 8. 31.	2023. 1. 1.∼ 2024. 7. 15.
	기계	2023. 9. 17.∼ 2024. 8. 31.	2023. 4. 1.∼ 2024. 3. 17.
	전기	2023. 5. 27.∼ 2024. 8. 31.	2023. 4. 1.∼ 2024. 7. 5.

3. 또한, 위와 같이 분야별 건설사업관리기술인을 변경 투입 하기 7일전까지 공사 진행 현황을 재확인하여 공종별 담당 공사관리관과 최종 투입 일자를 확정하여 건설사업관리기술인을 투입하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관	조은주		주무관	이상근		주무관	허진		주무관	이승준
의료시설과장	정채문		건축부장	12/02
신명승
협조자
시행	건축부-34092	(	2022.12.02	)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-2133-0750	/	meccajo@seoul.go.kr	/	대시민공개