문서번호	설비부-33625
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	12/05
			김중영
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 서울특별시 경찰청 요청사항 및 고용개선지원비 반영 등에 대한 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동 월드컵경기장교차로 일대

○ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

○ ******************************

○ *******************

○ ************************************************

2		관련근거

○ 통신공사 실정보고 사항에 대한 검토 보고 [제2자유입건 제2022-432호 ('22.12.02.)]

3		추진경위

□ '20. 01. 16. : 무인교통감시장치 이설 협의(설비부 → 서울특별시 경찰청)

▶ 단계별 교통처리계획에 따른 공사구간에 저촉되는 무인단속카메라 이설 필요

□ '20. 02. 06. : 무인교통감시장치 이설 협의 회신(서울특별시 경찰청 → 설비부)

▶ 원인자 부담 조치 : 장비는 철거 후 보관하고, 이설 위치는 별도 협의

□ '22. 10. 12. : 무인교통감시장치 재설치 협의(설비부 → 서울특별시 경찰청)

▶ 단계별 교통처리 계획에 따라 재설치 위치 협의

□ '22. 11. 16. : 무인교통감시장치 재설치 협의 회신(서울특별시 경찰청 → 설비부)

▶ 재설치 위치 변경 및 내구연한 경과에 따른 무인단속카메라 구매 설치 필요

4		검토내용

○ 서울특별시 경찰청 요청사항 반영

- 단계별 교통처리계획으로 철거 후 보관중인 무인교통감시장치 내구연한 경과로 인한 서울특별시 경찰청의 무인교통감시장치 신규구매 설치 요청사항으로서, 원인자 부담에 따른 신규 설치 필요

***	***	***
********	*********** ********	*********** ***********

- 지하차도 개통에 따른 교통량 수요 감소로 인한 재설치 위치 변경 필요

************	************

○ 고용개선지원비 반영

- 고용개선지원비 적용대상

**	*********	****	****
****	***************** **********************	**	**********

- 세부검토 내용

****	****	****	**
****	***************** **********************	**
****	******* *******************	**
****	************ *******	**
*******	**** ****************************	**
***	******************************************************	**
******* ******	***********	**	***** **

○ 주요 물량변경(도급비)

(단위: 천원)

***	***	***	***	***	***
***********	*****************************	*	*	*	******
***********	************** **************	*	*	*	******

○ 공사비 증·감

(단위:  원)

***	***	***	***	**
*****	***********	***********	*************
*******	*	**********	*************
***	***********	***********	**************
******	**********	**********	*
***	***********	***********	*************

○ ***************************

○ 건설사업관리단 검토의견

- 서울특별시 경찰청 요청사항을 반영하여 변경 시공함이 타당하다고 판단되며, 실정보고에 대한 검토결과 적정함.

- 고용개선지원비 반영으로 인한 계약금액 조정 내역을 검토한 결과, 관련 규정에 의거 상기와 같이 고용개선지원비를 반영하여, 변경 계약함이 타당하다고 사료됨.

5		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 공문 각 1부.

2. 무인교통감시장치 협의 공문(서울특별시 경찰청) 각 1부.  끝.