문서번호	토목부-35633
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		황윤기	12/05
			하현석
협조
	주무관		代이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

설계변경(1차6회, 최종)검토 보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

설계변경(1차 6회, 최종)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 설계변경(1차6회, 최종) 검토

결과 및 조치계획을 보고 드림

※ 관련근거: 공사 설계변경(1차 6회) 검토결과 보고(보차도교) - 감리부-22-01884호('22.11.30.)

□ 공사개요

○ 사 업 명: 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모: 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간: '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.12.15.)

○ 도 급 비: *************************

○ 시공사/건설사업단: *******************************

□ 설계변경 사유

○ 차수 공사 준공에 따른 정산

- 제경비 및 금차 실 시공분 반영한 정산 설계변경

□ 설계변경 내역

○ 1차 6회: ******************************

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감		비고
** **	*****	*************	*************	**	*************
	*****	*************	*************		*
	*****	*************	***********	**	*************
	***** ********	************	************		*
	****	**********************	***********************		*

※ 관급비에서 감액되는 11억은 보행교 2차공사 발주 및 설계변경으로 기 원인행위 함

○ 1차 6회: *******************

(단위 :천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감(△)	비 고
A.보차도교	3,006,172	2,374,300	△631,872
토 공	58,942	18,209	△40,733
2. 구조물공	559,291	597,072	37,781
3. 상 부 공	1,382,760	-	△1,382,760
4. 가시설공	129,801	230,750	100,949
5. 부 대 공	800,207	1,362,479	562,272
6. 기타공종	75,171	165,790	90,619
B. 램 프 교	6,632	804,362	797,730
순공사비	3,012,804	3,178,662	165,858
간접공사비	1,346,939	1,181,081	△165,858
물가상승비	499,257	499,257	-
공급가액	4,859,000	4,859,000	-
부가가치세	485,900	485,900	-
도급공사비	5,344,900	5,344,900	-

□ 조치계획

○ 상기 검토결과와 같이 설계변경 및 변경계약을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙 임: 1. 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 변경 설계서 1부.  끝.