문서번호	기전과-29589
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
노경환		최경주	12/05
			최연우
협조

「2022년 어린이보호구역 개선사업 교통신호기 공사(가재울사거리)」

설계 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2022년 어린이보호구역 개선사업 교통신호기 공사(가재울사거리)」

설계 변경 검토 보고

2022년 어린이보호구역 개선사업 교통신호기 공사[가재울사거리]와 관련하여 감리업체에서 제출한 설계 변경 건을 검토하고 그 결과에 따라 설계 변경을 시행하고자 함.

□ 관련근거

○ 2022년 어린이보호구역 개선사업 교통신호기 공사[가재울사거리] 실정 보고 검토 보고[2차]

- 기전과-28905호(2022.11.17.)

○ 제1회 설계변경 제출[2022년 어린이보호구역 개선사업 교통신호기 공사(가재울사거리)]

- 대영GE22B-11-35호(2022.11.28)

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 2022년 어린이보호구역 개선사업 교통신호기 공사(가재울사거리)

○ 공사 위치 : 서대문구 남가좌동 385-14 가재울 사거리

○ 공사 내용 : 교통신호기(차/보) 신설

○ 계약 방법 : 전자공개수의계약(지역제한)

○ 계약 금액 : *****************************

○ 계약 업체 : *******************

○ 공사 기간 : *************************

○ 감리 업체 : ********

□ 설계 변경 내용

○ 변경 예상 금액 : *************

총 공 사 비		변 경 전	변 경 후	증 감 액	비 고
도급비	공 급 가 액	**********	**********	*************
	부 가 가 치 세	*********	*********	*************
	합 계	**********	**********	*************	**

○ 설계변경 사유

- **********************************

- ********************

- **************************

○ 원가계산 증감 내역

No	구 분	현 재 적 용	변 경 내 용	증 · 감 액
1	직접재료비, 직접노무비, 기계경비	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 의한 금액 변동	1,748,600
2	간접노무비	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 직접노무비 변동에 의한 금액	133,457
3	산재보험료	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 노무비 변동에 의한 금액	40,980
4	고용보험료	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 노무비 변동에 의한 금액	11,187
5	건강보험료	계약내역서에 따른 금액 표기	건강보험료 자료 미제출로 인한 감액	-1,401,240
6	연금보험료	계약내역서에 따른 금액 표기	연금보험료 자료 미제출로 인한 감액	-1,804,171
7	기타경비	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 재료비, 노무비, 변동에 의한 금액	157,004
8	산업안전보건관리비	계약내역서에 따른 금액 표기	증빙자료 제출에 의한 정산	-62,364
9	퇴직공제부금비	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 직접노무비에 의한 금액	828,853
10	노인장기요양보험료	계약내역서에 따른 금액 표기	증빙자료 미제출로 인한 감액	-171,932
11	일반관리비	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 재료비, 노무비, 경비 변동에 의한 금액	-31,178
12	이윤	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 노무비, 경비, 일반관리비 변동에 의한 금액	-188,793
13	고용개선지원비	계약내역서에 따른 금액 표기	노무비 구분관리 및 지급확인제 적용제외로 해당사항 없음으로 인한 감액	-4,690,730
14	고재처리비	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 의한 금액 변동	-15,328
15	폐기물처리비	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 의한 금액 변동	255,000
16	부가가치세	계약내역서에 따른 금액 표기	실정보고에 따른 공급가액 변동에 의한 금액	-519,065
합 계 금 액 (도급비)				-5,709,720

□ 감리단 검토 의견

○ 현장 여건에 따른 물량 변경을 반영하고 간접비 및 보험료 등 제경비

정산에 따른 금액 조정이 발생하여 설계변경이 요구 됨.

□ 조치 의견

○ 실정보고 승인 내용을 바탕으로 한 감리 업체 설계변경 보고서 검토        결과, 그 내용이 타당하여 설계변경을 시행 후 준공하고자 함.

○ 건설근로자공제회의 퇴직공제부금비 반영 요청 공문을 통해 퇴직공제       부금비 반영, 계약 업체의 상용근로자 사용으로 인해 추후 2차 설계변경을       통해 퇴직공제부금비 내역 삭제. [기전과-28563호(2022.11.08]

붙임  1. 감리 업체 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 도면 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.