문서번호	설비부-33577
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		설비총괄과장
허진		12/05
		장병선
협 조
	주무관		최환수

『강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

2022. 12.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부		요청일		2022.12
공 사 명	강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사
공사개요	공사규모		가로등 및 신호등 설치공사,지하차도터널등 설치 및 수배전 설비공사
	공사기간		2012.08.02.~2022.12.31
	감 리 사		㈜동명기술공단
	설 계 사		㈜신우디엔씨/(주)트래픽스
	시 공 사		㈜진영전력
자문 안건명			강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사 설계변경 건				요청금액		********
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : -구룡지하차도 신호등 교통처리계획 개선내용 반영(신호기 신설 및 이설 외)
건설사업관리기술단 의견(요약) ○ 내용 : 현장여건 반영 등에 따른 실정보고를 기 완료하였고, 계약상대자가 제출한 설계변경 도서가 적정하여 설계변경 소위원회 심의를 득한 후 설계변경 추진하고자 함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 1.구룡지하차도 신호등 교통처리계획 개선내용반영 -신호기 신설 및 이설에따른 신규설계 ▪ 물량 증감내역 * 세부내용 참조					▪ 공사비 증감내역 ************************ ************************ *********************** ▪ 설계변경 주요 공종 - 구룡지하차도 신호등설비 변경
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부. 4. 관련공문 1부.					************** *************** ************** ***********

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사
계약금액	******************** *****************	***	***************	시공사	㈜진영전력
공사기간	2012.08.02.~2022.12.31	낙찰율	86.745%	설계자	㈜신우디엔씨 ㈜트래픽스
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜동명기술공단
공사규모	가로등 및 신호등 설치공사,지하차도터널등 설치 및 수배전 설비공사			**************

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	따로 붙임 “주요 변경 내용” 참조
공 사 비	***********		***********	********
적 용 요 율	낙찰률 86.745%		- 기존 : 계약단가 - 신규 : 낙찰률 (86.745%)
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	-
설계변경 근거	방 침	실정보고승인:도시기반시설본부
	관련규정	공사계약일반조건 제6절~7절
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획,운영부서 요구사항등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	따로 붙임 내용
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	*******************************

□ 관련문서

· ■실정보고승인 : 도시기반시설본부공문-설비부-33025

· ■서울시경찰청공문 : 교통관리과-27157