문서번호	물재생시설과-29267
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장
곽윤석	최년수	12/05
		김윤수

- 스마트 하수처리공정 인프라 구축 -

중간보고회 및 통합웹, 모바일앱 시연 개최계획

2022. 12.

물재생시설과

『스마트 하수처리공정 인프라 구축』

중간보고회 및 통합웹, 모바일앱 시연 개최계획

우리 부서에서 추진 중인 『스마트 하수처리공정 인프라 구축』중간보고회를 통합웹 및 모바일앱 시연으로 아래와 같이 개최하고자 함

Ⅰ		용역개요

▢ 용 역 명 : 스마트 하수처리공정 인프라 구축

▢ 시 행 사 : *********************

▢ 사업기간 : ‘21. 6. 24. ~ ’23. 12. 19.

▢ 계약금액 : ************

▢ 사업범위

- 서울물재생시설공단 및 물재생센터 간 망연결 및 시스템 표준화

- 데이터센터 통합서버 및 물재생센터 DB인프라 구축

- 중단없는 물재생운영을 위한 온라인 원격 모니터링 플랫폼 구축

Ⅱ		그간 추진현황

▢ '20.10.20. : 스마트 하수처리공정 인프라 구축

▢ '21.01.~04. : 사전절차 시행

- 행안부 사전협의 시행, 제안요청서 및 보안성 검토, 일상감사

▢ '21.04.~06. : 사업발주 및 계약체결

▢ '21.07.~09. : 착수보고 및 관계자 회의 개최

▢ '21.11.~'22.03. : 과업변경사항 검토 및 통합서버 이전검토

- 착수보고 및 관계자 회의결과 등에 따른 변경내용 검토

- 통합서버 등 서버실 이전검토(공단본부→데이터센터)

▢ ‘22.03. : 통합서버 이전에 따른 보안성 검토완료(검토결과:적정)

▢ ’22.04. : 과업변경요청에 따른 과업변경심의회 개최

*****************************************

**********************************************

▢ ‘22.04.~05. : 과업변경에 따른 원가심사 시행(정보시스템담당관)

******************************

▢ ’22.06. : 설계변경(1차) 시행

************************************************

**************************************************

▢ ‘22.05. : 물재생센터 서버 설치완료

▢ ‘22.08.~09. : 데이터센터 서버설치 및 케이블포설 완료

▢ ‘22.09.~10. : 데이터 연계 및 통합웹(모바일앱) 개발완료

▢ ‘22.10.~ : 데이터 정확성 검토 및 테스트 시행

▢ ’22.11. : 과업변경요청에 따른 과업변경(2차) 심의회 개최

******************************************

**********************************

▢ ’22.11. : 설계변경(2차) 시행

**********************************************

***************************************************

Ⅲ		중간보고회 개최

▢ 개최일시 : ‘22. 12. 6.(화) 10:00 ~ 11:30

▢ 개최장소 : 물순환안전국 회의실(서소문별관 8층)

▢ 참 석 자

- 물재생시설과장 외 시설과 직원

- 시행사(2명) : 사업PM 외 1명

▢ 주요 보고내용

- 사업 주요추진 사항 및 향후 센터별 교육 등 준공일정 보고

- 통합모니터링(통합웹, 모바일앱) 시연 및 의견청취

Ⅳ		향후계획

▢ 센터별 통합웹 및 모바일앱 개시에 따른 검토요청

▢ 중간보고회 및 시연에 따른 검토결과 반영 후 최종보고회 개최

끝.