문서번호	시설관리과-36969
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김민호	정수용	12/05
		유명은

[2022년 우장산배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역]

준공기한 연기 검토보고

2022. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

『2022년 우장산배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역』

준공기한 연기 검토보고

우리사업소에서 시행중인『2022년 우장산배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역』과 관련하여 준공기한 연기사유가 발생하여 다음과 같이 검토 내용을 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2022년 우장산배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역

○ 용역내용 : 우장산배수지 및 아리수올림터 정밀안전진단

○ 용역기간 : '22.04.15. ~ 12.16.

○ 용역업체 : *******************

○ 용역금액 : ************

□ 검토내용

○ 준공기한 연기사유

***********************************

**************************************

**************************************

****************************

********************************

*********************************

○ 용역기간 변경(증14일)

- 당초 : '22.04.15. ~ 12.16.(240일)

- 변경 : '22.04.15. ~ 12.30.(254일)

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 행정사항

○ 도급사에 준공기한 연장계약 통보 및 합의서 작성

○ 행정지원과에 준공기한 변경계약 의뢰

붙임 : 계약연장 요청 공문 1부.  끝.