아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰[지하철 7호선(장암역~도봉산역) 고가하부 적치 폐기물 처리 용역]

우리 부에서 시행 중인 「지하철 7호선(장암역~도봉산역) 고가하부 적치 폐기물 처리용역」에 대해 아래와 같이 정산 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 지하철 7호선(장암역~도봉산역) 고가하부 적치 폐기물 처리용역

나. 도 급 비 : 금 8,610,800원

다. 용역기간 : 2022.10.25. ~ 2022.12.31.

라. 계약상대자 : 주식회사 주원

마. 계약변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감
계약금액	금 8,610,800원	금 11,605,000원	증) 2,994,200원
용역기간	'22.10.25.~'22.12.31.	'22.10.25.~'22.12.31.	변경없음

바. 계약변경사유 : 폐기물, 운반거리 등 실물량 정산에 따른 변경

붙임  관련서류 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	김민수		토목2과장	박형복		도시철도토목부장	12/05
류용열
협조자
시행	도시철도토목부-30558	(	2022.12.05	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2623	/전송	02-6438-2649	/	kimminsu87@seoul.go.kr	/	부분공개(5)