문서번호	도시철도토목부-30470
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김민수		박형복	12/05
			류용열
협조
	재무과장		전성권

지하철 7호선(장암역~도봉산역) 고가하부 적치 폐기물 처리용역

계약물량 정산 변경 검토보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

지하철 7호선(장암역~도봉산역) 고가하부 적치 폐기물 처리용역

계약물량 정산 변경 검토보고

지하철 7호선(장암역~도봉산역) 고가하부 적치 폐기물 처리용역』과 관련하여 계약자로부터 제출된 계약물량 정산에 따른 변경계약 요청 건에 대한 검토보고임

※ ㈜주원 JW2022-H0691호(2022.12.1.)

Ⅰ		용 역 개 요

ㅇ 용 역 명 : 지하철 7호선(장암역~도봉산역) 고가하부 적치 폐기물 처리 용역

ㅇ 위    치 : 경기도 의정부시 장암역 301-6 외 3필지(7호선 장암역 고가하부)

ㅇ 계약금액 : 금 8,610,800원

ㅇ 계약기간 : 착수일부터 ~ 2022.12.31.

ㅇ 계약내용 : 고가하부 적치 폐기물에 대한 수집·상차·운반·처리 용역

ㅇ 계 약 자 : (주)주원 대표 김기홍

Ⅱ		설계변경 검토

ㅇ 폐기물 처리 물량 및 운반거리, 폐기물 수집 작업인력 등은 행정대집행 결과에 따른 실물량으로 반영 정산

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
폐합성수지 및 폐목재	20톤	36.58톤	증) 16.58톤	올바로 시스템 실물량 반영
운반거리	30km	52km	증) 22km	스마트송장 시스템(비2테크) 실거리 반영
작업인력	20명	5명	감) 15명	실투입 인원 반영
굴삭기 평탄화 작업	-	1식	증) 1식	서울교통공사의 적치 토사 제거 요청사항 반영 (토목사업소-22644호, 2022.08.24.)

ㅇ 실물량 반영 계약금액 변경

구 분	당 초	변 경	증 · 감
계약금액	금 8,610,800원	금 11,605,000원	증) 2,994,200원
계약기간	'22.10.25.~'22.12.31.	'22.10.25.~'22.12.31.	"변경없음"

※ 예산과목

- 도시철도 건설, 도시철도 건설관리(도시철도건설사업비특별회계), 도시철도품질향상관리, 일반운영비, 사무관리비

- 행정운영경비, 기본경비(도시철도건설사업비특별회계), 기본경비(도시철도),

일반운영비, 사무관리

Ⅲ		조치의견

ㅇ「지하철 7호선(장암역~도봉산역)고가하부 적치 폐기물 처리용역」에 대하여 상기 검토의견을 반영하여 설계변경을 시행코자 함

붙임  관련문서 각 1부.  끝.