문서번호	시설관리과-42365
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
김병주	이유찬	이동욱	12/06
			장청락
협 조
	행정지원과장		신종선

준공기한 연기 검토보고(2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사)

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기 검토보고

2022.  12. 6. (화)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기 검토보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 김병주☎2192

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 준공기한 연기 보고서에 대한 검토 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-15115(2022.12.06.)호

- 준공기한 연기 검토보고서 제출(종로 장기사용 송배수관)

□ 공사 개요

*********************************

**************************

************************************

*********************

************************************

************************

***************************

□ 공사진행 현황

ㅇ 공 정 율: 90% (2022. 12. 5. 현재)

ㅇ 완료공정: 관로부설 및 밸브실 설치

ㅇ 잔여공정: 무단수차단(D900mm) 1개소 및 기존관 연결 4개소

□ 준공기한 연기요청

ㅇ 시공사 준공기한 연기 요청사유

- 동절기 굴착통제로 인한 공사 중지(50일)

※ 동절기 굴착통제 기간: ’22. 12. 1. ~ ’23. 2. 28.

ㅇ 준공기한 연기요청일: 총 85일(굴착가능한 '23.3.1.부터 50일간)

- 당 초: 2022년 8월 17일 ~ 2023년 1월 24일

- 변 경: 2022년 8월 17일 ~ 2023년 4월 19일

□ 검토의견

ㅇ 서울시설공단 검토

- 동절기 굴착통제 기간을 고려하여 시공사가 요청한 준공기한 연기가 타당함

ㅇ 사업소 검토

- 하반기 추가사업으로 실착공이 9월 초임을 감안, 공사기간 부족으로 연기함이 타당함

ㅇ 준공기한 연기내용

- 연기사유: 절대공기 부족

- 당    초: 2022년 8월 17일 ~ 2023년 1월 24일

- 변    경: 2022년 8월 17일 ~ 2023년 4월 19일

ㅇ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 조치계획

ㅇ 검토결과 준공기한 연기 사유가 타당하므로 준공기한 변경 시행하고 그 결과를 공단으로 회신하고자 함.

붙임  준공기한 연기요청 관련서류 1부.  끝.