문서번호	급수운영과-36060
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
박상권		최용진	12/06
			이승완
협 조

보 고 서

(공사실정보고)

2022. 12.

북부수도사업소

[급수운영과]

보   고   서

명에 의하여 시설공단으로부터 접수된 『월계1-1 중블록 공급체계 구축공사』와 관련, 공사감독2처-15051(22. 12. 05.)호 실정보고를 검토후 아래와 같이 보고합니다.

2022. 12. 05.

보고자 : 토목6급 박 상 권

1. 관련근거 : 공사감독2처-15051(2022.12.05.)『공사현장 실정 보고서(월계1-1중블록-4차)』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계1-1중블록 공급체계 구축공사

나. 공사기간 : 2022. 06. 10. ∼ 2023. 01. 05.

다. 도 급 액 : 656,148,700원

라. 공사개요 : 송배급수관 부설 D=500mm  L=745m

마. 도 급 자 : (주)부경이엔씨 대표 김창호

3. 보고내용

가. 횡단굴착 물량증가

- 당초 횡단굴착이 6개소로 설계되었으나 지하시설물 확인 등의 사유로 횡단굴착 물량이 15개소 증가됨

4. 검토의견

가. 상수도관 부설시 지하매설물 확인 및 부단수차단 위치 확인을 위한 횡단굴착   개소 증가로 추후 설계변경시 반영이 타당함

증) 개략공사비 약 11,880천원(직접공사비)

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

첨부 : 관련공문 각1부.  끝.