문서번호	시설관리과-35038
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이범환		김영민	12/06
			송병욱
협 조

『수유아리수올림터 원격감시제어반 제작구매설치』

설계변경(정산) 심의위원회 개최 결과 보고

2022. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

『수유아리수올림터 원격감시제어반 제작구매설치』

설계변경(정산) 심의위원회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 『수유아리수올림터 원격감시제어반 제작구매설치』의 준공(정산)에 따른 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

○ 건    명: 수유아리수올림터 원격감시제어반 제작구매설치

○ 계약기간: 2022. 7. 5.~2022. 12. 18.

○ 계약금액: *********************************

○ 계약업체: *******************

○ 사업규모: 원격감시제어반 1면 교체

□ 심의회 개최

○ 심의일정: 2022. 12. 6.(화) 15:00

○ 심의장소: 북부수도사업소 시설관리과

○ 심의위원

- 위 원 장: 기전팀장 김영민

- 위    원: 공업6급 이성남, 공업6급 이영훈, 시설7급 진하영

□ 심의내용

○ 설계변경의 타당성

○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

○ 계약 변동물량 계약단가 낙찰률 적용범위 내 적정여부 등

□ 심계변경 사항

○ 계약금액

(단위: 원)

구 분	변 경 금 액		증 · 감	비 고
	당 초	변 경
계약금액	139,811,980	138,160,000	감)1,651,980

○ 계약기간: 변경없음

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성: 타당

○ 제경비 적정 산정 미 적용 적정성: 적정

○ 계약 변동(증·감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부: 적정

○ 각종 제반 규정 준수여부: 준수

○ 관련 규정의 불명확한 내영에 대한 검토: 적정

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 후 변경계약 의뢰

붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 심의결과 1부.

4. 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.