문서번호	생산관리과-28200
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
김윤영		김형준	12/06
			김창중
협조
	재무회계과장		양연화

‘22년 병물아리수 운반차량 임차용역 설계변경 보고

2022. 12.

생  산  부

(생산관리과)

‘22년 병물아리수 운반차량 임차용역 설계변경 보고

『2022년 병물아리수 임차 용역』관련 화물차량 수량 조정에 따른 설계변경 사항을 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2022년 병물아리수 운반차량 임차 용역

ㅇ 계약기간 : 2022.1.24. ~ 12.10.

ㅇ 계약금액 : ************

ㅇ 계약내용 : 화물트럭(1톤, 2.5톤, 4.5톤) 임차 등

ㅇ 계 약 자 : ************

□ 설계변경

ㅇ 변경내용 : 화물트럭 임차 수량 조정

- 당    초 : 1톤 50대, 2.5톤 15대, 4.5톤 106대, 차량대기(5톤) 25시간

- 변    경 : 1톤 33대, 2.5톤  0대, 4.5톤  52대, 차량대기(5톤) 4.5시간

ㅇ 변경사유

- 실제 투입된 병물아리수 운반차량에 따라 차량 규격 및 수량 조정

□ 용 역 비 : 감 15,561,880원

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
합 계	**********	**********	***********	원단위 절사
용역원가	**********	**********	***********
부가가치세	*********	*********	**********

붙임  변경(계약)내역서 1부.  끝.