문서번호	도시철도설비부-28845
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
김태연		김이곤	12/06
			김중영
협 조
	송변전과장			전계목
	신호과장			代강신영
	주무관			박종석
	주무관			지상범

진접선(4호선 연장) 차량기지 건설 시스템분야 실시설계용역 준공 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

도시철도설비부

(정보통신과)

진접선(4호선 연장) 차량기지 건설공사

시스템분야 실시설계 준공 결과 보고

진접선(4호선 연장) 차량기지 건설공사 시스템(전력·통신·신호)분야 실시설계용역에 대한 준공 결과를 보고 드림

Ⅰ		사업 개요

❍ 과업내용: 진접선 차량기지 전력, 통신, 신호 실시설계

❍ 과업규모: 차량기지신설 197,400㎡ , 인입선 4.9km, 창동 지하변전소 1개소

❍ 용역계약 현황

분 야	전 력 (송변전/전차선)	통 신	신 호
계약자	*******	*****	*****
계약기간	*******************	*******************	*******************
계약금액	*********	*********	*********

Ⅱ		그 동안 추진경과

❍ '10.09.    : 예비타당성조사 완료(기획재정부)

❍ '13.12.19.  : 진접선 복선전철 기본계획 고시(국토교통부)

❍ '14.12.12. : 4호선연장(진접선) 사업추진계획(서울특별시)

❍ '15.01.09. : 진접선(4호선연장) 사업추진 계획수립

❍ '15.04.30. : 진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 기본 및 실시설계 용역 계약

❍ '16.12.12. : 기본계획(차량기지 위치) 변경 고시(국토교통부)

❍ '18.07.31. : 기본 및 실시설계(토목, 건축, 전기, 기계, 검수) 용역 완료

※ 시스템(송변전, 전차선, 통신, 신호)분야 기본설계 완료

❍ '18.09.05 : 차량기지 사업계획승인 고시(국토교통부)

❍ '20.04.09 : 시스템분야(전력, 통신, 신호) 실시설계 용역 계약

❍ '20.12.31 : 시스템분야(전력, 통신, 신호) 실시설계 용역 계약 1차수 준공

❍ '21.01.01 : 시스템분야(전력, 통신, 신호) 실시설계 용역 계약 2차수 계약

❍ '21.01.01 : 시스템분야(전력, 통신, 신호) 실시설계 용역 2차수 일시 중지

※ 일시정지: 선행공정(궤도 실시설계) 지연에 따른 설계용역 일시정지(1년)

❍ '22.01.01: 시스템분야(전력, 통신, 신호) 실시설계 용역(2차) 개시
❍ `22.03.19 : 진접선(본선) 개통(국가철도공단 사업주관)

❍ `22.04.15 : 시스템분야(전력, 통신, 신호) 실시설계 용역 준공보고회 개최

❍ '22.05.  : 신호분야 실시설계용역 변경계약 체결
*****************************************

******************************************************

❍ '22.06.20 : 시스템분야 실시설계 용역 준공기한 연기
- 기간: 당초( '20.4.~‘22.6.30), 변경:('21.1 ~‘22.9.30)
- 사유: 선행공정인 궤도분야 설계용역 기간(’22.9.30)으로 궤도분야                   실시설계용역 성과물 반영한 설계보완 필요

❍ '22.05.16 : 제14차 설계 경제성(VE) 신청

❍ '22.07.12 : 제14차 설계 경제성(VE) 검토 결과 통보

❍ '22. 08.31 : 시스템분야 실시설계 완료보고회 개최

❍‘22.09.11  : 시스템분야 실시설계 단가적정성 검토 의뢰

❍ '22.09.26 : 시스템분야 실시설계용역 준공기한 연기

- 기간: 당초('20.4.~‘22.9.30), 변경:('21.1 ~‘22.11.30)
- 사유: 단가적정성 심의, 총사업비 조정, 궤도설계 준공기한 연기

❍ ‘22.11.11. : 시스템분야 총사업비 조정 사전협의 진행

❍ ‘22.11.16. : 시스템분야 실시설계 단가적정성 검토 결과 통보

❍ ‘22.11.30. : 시스템분야 실시설계 용역 준공계 접수

Ⅲ		주요 사업내용 및 예산 내역

□ 주요 사업내용

(단위:백만원)

구분	주요내용	예산
합계		*******
전력	***********	******
	***********	******
	*************************	******
	***********	******
	***********************	*****
	*****	*******
통신	*******	******
	********	*****
	*******************	*****
	*********	***
	*******	***
	*******	***
	**********	*****
	*******	***
	*******	***
	*********	*****
	*****	******
신호	******************	******
	*****************	***
	*********	*****
	*******************	******
	****************	***
	*****	******

□ 설계 및 단가 적정성 검토 결과

(단위: 백만원)

구분	진접차량기지 건설공사 시스템 분야 공사 예산				비고
	용역		단가적정성(조달청)
	기본설계	실시설계	신청	결과
소 계	******	*******	*******	*******
전 력	******	******	******	******
통 신	******	******	******	******
신 호	******	******	******	******
증감률	*********		********

□ 사업비 분포

************************************

*****************************************

Ⅳ		향후계획

❍ 총사업비(19차) 신청	: `22. 12.

❍ 발주서류 검토 및 계획서 작성	: `22. 12.	∼ `23.  2.

❍ 사업 및 감리 발주	: `23. 1.	∼ `23.  4.

❍ 계약, 사업시행, 준공	: `23. 1.	∼ `24. 12.

Ⅴ		행정사항

❍  18차 자율조정 신청 금액을 반영한 총사업비 19차 협의 조정 설명서 작성

❍ 시스템 분야별 담당자 준공서류 검토 후 개별 준공

붙임  진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 실시설계 용역 준공도서    (전력·통신·신호) 각 1부(별도송부).  끝.