아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사 준공기한 연기의뢰

1. 기전과-28794(2022.12.06.)호 준공기한 연기보고 관련입니다.

2. 2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰

하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2022. 08. 17. ~ 2022.12. 12.

다. 계약업체 : (주)삼천리이엔지 대표 손원현

라. 계약금액 : 158,690,000원

마. 연기내용 : 2022년 12월 12일에서 2022년 12월 22일까지 연기

바. 연기사유 : 강서구청사거리 음향신호기 기능검사(도로교통공단) 지연에 따른

준공기한 연기

사. 연기사유 귀책소재 : 강서도로사업소

아. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	오태환		기전과장	12/06
김형집
협조자
시행	기전과-28808	(	2022.12.06	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개