문서번호	토목부-35855
결재일자	2022. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		代박상철	12/07
			하현석
협조
	주무관		박희정

설계변경 검토보고(전체22회, 16차 2회) 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사

2022. 12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

설계변경(전체22회, 16차2회)검토 보고

(강남순환도시고속도로 8공구 건설공사)

"강남순환도시고속도로 8공구 건설공사"와 관련하여 물가변동 및 실정보고 승인사항 반영, 과천시 보상 지연으로 인한 공사기간 연장에 대하여 설계변경 검토 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 토목부-35332(2022.12.1.) : "물가변동으로 인한 계약금액조정(19회)검토보고"

Ⅱ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사

○ 규    모 : 폭 4~8차로, 연장 18.8km

○ 도 급 비 : 352,954백만원(16차: 22,985백만원)

○ 공사기간 : '02.07.03. ∼ '24.12.31. (16차 : '22.01.07. ∼ '22.12.31.)

○ 시 공 사 : 롯데건설 외 1개사

○ 감 리 단 : (주)동명기술공단

Ⅲ		변 경 내 용

○ 설계변경 요약                                             단위:천원

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
전 체 (22회)	공사 기간	'02.07.03.~ '24.12.31.	'02.07.03.~ '24.12.31.	변경없음
	공사 금액	352,954,000	356,441,000	증) 3,487,000
금 차 (16차 2회)	공사 기간	'22.01.07.~ '22.12.31.	'22.01.07.~ '23.12.31.	증) 12개월
	공사 금액	22,985,000	21,050,000	감) 1,935,000

○ 설계변경 내용

- 실정보고 승인사항 현황                                                단위:천원

구분	제 목	주 요 변 경 사 항	공 사 비 (천원)
			당 초	변 경	증 감(-)
1	2022년 건설공사 계약금액 순회 점검 결과 통보에 따른 조치	1) ‘운반비’ 비목에 대해 ‘경비’ 비목으로 조정 2) 염곡동서지하차도 중 ‘벽체 PC마감 패널 부재 제작’ 비목 단가산출 부적정	-	-138,760	-138,760
2	매헌지하차도 과천 화훼단지 앞 볼라드 설치	매헌지하차도 시점부 과천 화훼단지측 차량 진출입으로 인한 보행자 안전 확보를 위한 볼라드 설치	-	21,460	21,460
3	대모지하차도 가림막 휀스 설치 승인	대모지하차도 교통전환에 따른 소음, 분지, 매연 등 민원 예방을 위한 가림막 휀스 설치	131,000	131,000	-
4	대모지하차도 광역상수도 사토장 변경	당초 선정된 수도권매립지 사토장 반출 불가 (토사반입 기준 부적정)에 따른 사토장 변경	394,000	387,000	-7,000
5	수목식재를 위한 가이식장 임대비 반영 외 3건(조경공사)	1) 가이식장 임대비 정산 반영 2) 시점~매헌지하차도 종점 녹지 식재계획 변경 3) 본이식 수량 조정 4) 현장내 미시공 수량 삭제	309,000	297,000	-12,000
6	염곡동서지하차도 종점~구룡지하차도 시점부 녹지계획 변경(방음림) 외 1건	1) 서초구청 요청사항으로 방음벽 대신 방음림을 조성하여 쾌적한 녹지환경 조성 2) 미시공 설계물량 삭제	716,000	673,000	-43,000
7	매헌지하차도 상부 교통안전시설 추가 설치 (교통처리 개선사항)	교통처리 개선을 위한 차선도색, 시선유도봉, 표지판 등 추가 설치	-	38,000	38,000
8	민마루삼거리 교통안전시설물 추가 설치	민마루 삼거리 주변 컬러유도선 및 충격흡수시설, PE방호벽 추가 설치	-	28,000	28,000
9	매헌지하차도 상부도로 교통표지판 설치 변경	매헌지하차도 상부도로 노후 표지판 교체변경	8,294	20,214	11,920
10	19차 ES 발생	K19 : 3.45%, 조정기준일 : 2022.04.30. (직전기준일 : 2022.01.01.)	-	3,731,390	3,731,390
11	기타수량 조정	1) 과천시 도시계획시설 실시계획 안가조건 반영(소로, 주차장, 녹지) 2) 기타수량 정산(상부도로 토공, 포장, 배수 등)	301,010	158,000	-143,010
합계			1,859,304	5,346,304	3,487,000

○ 도급비 검토 사항

- 설계변경(전체22회) : 물가변동(19회, 3.45%)으로 인한 계약금액 조정(토목부-35332) 및 매헌지하차도 상부도로 교통안전시설물 추가설치 등 실정보고 승인 사항 반영

- 설계변경(16차2회) : 매헌지하차도 상부도로 공사완료 따른 정산사항 -1,935백만원 감액 반영

○ 공사기간 연장 : 강남순환도시고속도로(8공구) 16차

	≪ 보 상 추 진 경 위 ≫
- `15.02. : 보상사업 위·수탁 협약체결(과천시, 한국농어촌공사) - `15.03. : 보상계획 공고 - `16.06. : 미협의 토지 수용재결 신청에 따른 공탁 실시 - `20.05. : 추가 보상 필지(총 5필지 839㎡) 발생 - `22.06. : 추가 보상 요청건 보상업무 추진(과천시 건설과) - `22.08. ~ : 감정평가 의뢰중

- 본 사업중 과천시구간은 토지보상이 현재 진행중으로 ‘23년 토지보상 완료 후 과천시 도시계획시설 실시계획 인가조건(소로 3-39, 주차장, 완충녹지 등) 우리 시 공사가 시행 가능한 바,

- 당 초 : `22.01.07.~ `22.12.31 →  변 경 : `22.01.07. ~`23.12.31. 연장코자 함

Ⅴ		사 업 비 검 토

(단위: 백만원)

구 분	전체(22회)			16차(2회)
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
1.토공	14,609	14,549	-60	1,195	1,075	-120
2.배수공	6,666	6,550	-116	729	478	-251
3.구조물공	136,853	136,976	123	1,868	2,999	1,131
4.포장공	12,019	12,070	51	2,235	2,849	614
5.기계설비공	413	413	-	-	-	-
6.조경공	4,485	4,370	-115	298	660	362
7.시상수도이설공	22,123	22,155	32	4,164	1,373	-2,791
8.부대공	25,615	25,818	203	4,242	4,280	38
9.교통시설물설치공	107	107	-	-	-	-
10.사급자재비	12,413	12,464	51	596	541	-55
직접공사비	235,303	235,472	169	15,327	14,255	-1,072
제경비(E/S포함)	76,421	79,422	3,001	5,568	5,108	-460
위탁공사	8,831	8,831	-	-	-	-
공급가액	320,555	323,725	3,170	20,895	19,363	-1,532
부가가치세	32,055	32,372	317	2,090	1,687	-403
모범신호수	344	344	-	-	-	-
도 급 액	352,954	356,441	3,487	22,985	21,050	-1,935

※ 총사업비 예산 범위내 사업비 변경 가능

○ 예산집행 계획

구 분			총사업비	기투자	‘22년			‘23년	‘24년 이후	비고
					계	집행액	사고이월액
총 괄	합 계		564,005	396,669	24,520	24,020	500	22,450	120,163
	설계비		21,090	18,200					2,890
	보상비		103,317	93,517					9,800
	공사비	도급	356,441	242,378	20,630	20,130	500	21,128	72,305
		기타	66,240	30,064	2,587	2,587		330	32,259
	감리비		16,917	12,510	1,303	1,303		1,195	1,909
강남순환 8공구	소 계		361,689	348,830	11,078	10,578	500	500	1,281
	설계비		17,390	17,390
	보상비		93,517	93,517
	공사비	도급	220,941	211,980	8,541	8,041		420
		기타	18,627	15,833	2,237	2,237		80	477
	감리비		11,214	10,110	300	300			804
양재대로 구조개선	소 계		194,070	44,725	10,000	10,000		20,463	118,882
	설계비		3,700	810					2,890
	보상비		9,800						9,800
	공사비	도급	127,457	27,284	8,850	8,850		19,018	72,305
		기타	47,613	14,231	350	350		250	32,782
	감리비		5,500	2,400	800	800		1.195	1,105
위수탁 공사	소 계		8,246	3,114	3,442			1,690
	설계비
	보상비
	공사비	도급	8,043	3,114	3,239			1,690
		기타
	감리비		203		203

Ⅵ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정 및 공사기간 연장 등 정산 반영하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계변경 책임기술인 검토서 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.