아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	'22년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 사업기간 등 연장 검토보고

1. 서울디자인재단 마케팅팀-3117(2022.12.2.)호와 관련입니다.

2. 서울디자인재단의 '22년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 사업기간 연장(정산서  제출 기간 연장 포함)에 대하여 다음과 같이 처리하고자 합니다.

가. 요청사항

① 사업기간 연장 : *****************************************

② 정산서 제출 기간 연장 : ************************

나. 연장사유

- **************************************************       *********************************************       ******************************

다. 검토결과 : 승인

- DDP 주차면 전기차 증설 공사는「친환경자동차법 시행령」, 「서울시 환경친화적  자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례」에 따라 2023.1.27.(금)까지 완료하여야  하므로, 대행계약서 제4조 및 제7조에 따라 사업기간 연장 등을 승인하고자 함

붙 임 : 1. 서울디자인재단 공문 1부.

2. 사업 대행계약서 1부. 끝.

주무관	김혜경		디자인정책팀장	김남수		디자인정책담당관	12/07
김규리
협조자
시행	디자인정책담당관-4242	(	2022.12.07	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울시청 8층 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2704	/전송	02-2133-1065	/	kinh1980@seoul.go.kr	/	부분공개(5)