문서번호	문화시설과-10221
결재일자	2017.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화시설2팀장	문화시설과장
서은성	이영미	12/08 오희선

가재울 문화복합시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구

용역기간 연장계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
문화시설과-4020 (2017.5.11.)	(재)한국지식 산업연구원	계약기간 연장	계약기간 연장합의	61,000천원

2017. 12.

문화시설과

가재울 문화복합시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구

용역기간 연장계획

가재울 문화복합시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역의 세부 과업내용 변경에 따른 추가기간 소요로 용역 준공기한을 연장하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 가재울 문화복합시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역

○ 용역기간 : ’17. 06. 22. ~ ’17. 12. 22.(6 개월)

○ 계약금액 : 61,000천원

○ 용역업체 : 재단법인 한국지식산업연구원

○ 과업내용

- 문화복합시설(공공도서관 포함) 건립 타당성 분석

- 문화복합시설 건립 기본계획 및 운영방안 수립

□ 그간 추진경과

○ 용역 계약체결	’17. 6. 21.(수)

○ 용역 착수보고회	’17. 7. 11.(화)

○ 용역 중간보고회	’17.10.19.(목)

□ 용역변경 계획

○ 용역기간 연장

구 분	당 초	변 경
용역기간	’17.06.22.~’17.12.22.	’17.06.22.~’18.02.22.

○ 연장사유 : 세부 과업내용 변경에 따른 소요기간 추가 및 용역수행 완성도 제고를 위해 기간 연장(계약금액 : 증감 없음)

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후일정

○ 변경계약(계약기간 연장) 의뢰(→ 재무과)	’17.12. 8.

○ 최종 보고회                                              ’18. 1월중

○ 용역 성과품 납품	’18. 2월중

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.