문서번호	친환경건물과-4900
결재일자	2022. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김순곤		이원재	12/07
			서은경
협조
	주무관		장천섭

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사 건설폐기물 처리용역 계약금액 조정(정산) 검토보고

2022. 12.

기후환경본부

(친환경건물과)

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

건설폐기물 처리용역 계약금액조정(정산) 검토보고

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사 건설폐기물 처리용역에 대한 계약금액을 조정(정산)하고자 아래와 같이 검토 보고합니다.

□ 용역개요

가. 용 역 명 : 남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : '22.3.18. ~ '23.1.24.

**********************

라. 계 약 자 : (주)벽성그린산업 대표 황윤남, (주)금송산업개발 대표 천순희

□ 계약금액 조정

가. 계약금액 조정사유

- 설계 물량산출 오류에 따른 처리물량 증가

- 기존 건물에 버려진 폐기물로 인한 처리물량 증가

- 인테리어공사 추가에 따른 처리물량 증가

- 외부 부대토목공사 및 공사내용 추가에 따른 처리물량 증가 등

나. 월별 폐기물 처리현황(올바로시스템* 확인)

폐기물 월	혼합폐기물		폐콘크리트		건설폐재류		비 고
	횟수	처리량(톤)	횟수	처리량(톤)	횟수	처리량(톤)
**	*	*****	*	*****
**	**	******	*	******
**			*	*****
**	*	*****	*	*****
**	*	*****
**	*	*****
***	*	*****	*	*****
***	*	*****
***	*	****	*	*****	*	*****
**	**	******	**	******	*	*****

* 올바로시스템 : 한국환경공단이 운영하는 전산시스템으로, 폐기물의 배출에서부터 운반·최종처리까지의 전 과정을 인터넷을 통해 실시간으로 투명하게 관리하는 IT기반 폐기물 종합관리 시스템

다. 폐기물 처리에 따른 계약금액 조정

폐기물명	단가 (원)	변경 전		변경 후		증·감		비 고
		수량 (톤)	금액 (원)	수량 (톤)	금액 (원)	수량 (톤)	금액 (원)
*****	******	*******	*********	******	*********	******	*********
*****	******	*****	*********	*****	*********	****	***
************************	*******	******	*********	******	**********	*******	**********
******* *****************	*******	*******	**********	******	**********	*******	**********
******	******	*******	*********	******	*********	*******	*********
******	***	*******	******	******	*******	*******	******
******			**********		**********		**********	****
*****			*********		*********
******			**********		**********		**********

* 스마트송장 : 건설폐기물 운반차량의 차량번호, 상‧하차지, 운행경로, 운행시간, 총 거리 등을 자동으로 기록‧집계해 관리자가 실시간으로 확인할 수 있는 운반관리 시스템

*****************************                             (단위:원)

***********************************************************************************************

마. 단가적용 기준 : 기존 계약단가 적용

□ 보고자 처리의견

올바로시스템상 처리현황 검토결과 용역사의 계약금액조정 요청이 적합하다고 판단되므로 위와 같이 계약금액을 조정(정산)하고 준공처리하고자 함.

붙임  1. 계약금액 조정요청 공문(남산창작센터 건설폐기물 처리용역) 1부.

2. 변경내역서(남산창작센터 건설폐기물 처리용역) 1부.

3. 폐기물처리 현황(4월~12월, 올바로시스템 자료) 1부.  끝.