문서번호	시설관리과-27654
결재일자	2022. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
박건수		신근호	12/07
			강호광
협조

대형 제수밸브 점검정비 용역(강남지역)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

2022. 12.

상수도사업본부

(시 설 부)

대형 제수밸브 점검정비 용역(강남지역)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

「대형 제수밸브 점검정비 용역」의 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검․정비 용역(강남지역)

ㅇ 용역대상

- 강남지역 400㎜이상 버터플라이밸브(1,944개, 설치 후 3년 이상 경과)

ㅇ 용역기간 : ‛22. 04. 12. ~ 12. 9.

연번	용 역 명	사업규모	계약금액 (천원)	용역사
계		************	*********
1	대형제수밸브 점검정비 용역(강서,남부지역)	************	********	************
2	대형제수밸브 점검정비 용역(강남,강동지역)	**********	********	************

※ 한강 이남, 이북지역으로 구분하여 격년제로 대형제수밸브 점검·정비용역 시행

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

ㅇ 설계변경 심의위원회 개최

- 건    명 : 대형제수밸브 점검정비 용역(강서, 남부)

대형제수밸브 점검정비 용역(강남, 강동)

- 일    시 : 2022. 12. 7.(수) 13:00

- 장    소 : 4층 소회의실

- 개최사유 : 설계변경 적정성 심의

ㅇ 설계변경 심의위원회 구성

- 위 원 장 : 시설관리과장

- 위    원 : 시설6급 강정구, 박경원, 임춘길, 최경서

- 간    사 : 시설7급 박건수

□ 설계변경 내용

ㅇ 설계변경 사유

- 실제 용역 진행에 따른 점검정비 물량 증감 반영

- 아리수정수센터 추가 물량 반영

- 교통통제에 따른 야간 점검정비 증감 반영

- 산업안전보건관리비 정산

ㅇ 계약금액 변경

구 분	금액변경		증감
	변경전	변경후
***********	*********	*********	*********
***********	*********	*********	*********

ㅇ 설계변경 사항

구 분	물량변경(개소)		증감
	변경전	변경후
*	*****	*****	*****
***********	*****	*****	*****
***********	***	*****	*****

***********************************************

□ 심의결과 : 원안 가결(적정)

위 검토자 : 설계변경심의 위원회

위원장 : 시설관리과장            신근호

위  원 : 누수대응과 지방시설주사 강정구

위  원 : 시설건설과 지방시설주사 박경원

위  원 : 시설관리과 지방시설주사 임춘길

위  원 : 시설관리과 지방시설주사 최경서

□ 향후계획

ㅇ 설계변경 심의결과에 의한 용역 변경계약 의뢰 (→본부 재무회계과)

ㅇ 용역 준공검사 및 준공 시행

붙임  1. 설계변경 요약보고서 각 1부.

2. 변경내역서 각 1부.

3. 설계변경 심의 결과서 각 1부.  끝.