아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리체계 구축 용역)

1. 수변감성도시과-4963(2022. 12. 07.)호와 관련입니다.

2.「물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리체계 구축 용역」에 대해 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리체계 구축 용역

나. 계약금액 : 520,490,000원(3차)

※ 총계약금액 : 1,168,490,000원

다. 계약업체 : (주)동일기술공사, 한국건설기술연구원

라. 변경내용 : 준공기한 연기에 따른 계약기간 연장

변경내용	당초	변경	비고
계약기간 (3차분)	2022. 7. 1.~2022. 12. 20.	2022. 7. 1.~2023. 6. 30.

마. 연기사유 : 준공기한 연기의뢰서 참조

바. 지체상금 : 미부과

붙임  1. 방침서 1부. 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	수변감성도시과장
주무관	하록		물순환시설팀장	채재일		수변감성도시과장	12/07
代김세정
협조자
시행	수변감성도시과-4980	(	2022.12.07	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길, 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3773	/전송	02-2133-1041	/	playhr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)