문서번호	도로보수과-29241
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
최선보		代주영진	12/08
			김용제
협조

2022년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)

설계변경 검토 보고(제1회, 최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

강서도로사업소

도로보수과

2022년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)

설계변경 검토 보고(제1회, 최종)

우리 사업소에서 시행 중인『2022년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)』에 대해 제1회(최종) 설계변경 사항을 보고 드림

1		관련근거

○ ’22년 노후포장 정비공사 추진계획 [도로보수과-1642(‘22.2.23.)]

○ ’22년 노후포장도로 정비공사 설계변경서 제출[감리부-22-01914(‘22.12.01.)]

2		공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)

○ 공사규모 : 절삭 후 덧씌우기 T=5~20cm, A=1,501.4a

○ 공사기간 : ’22.5.20.~’22.12.15.

○ 사 업 비 : 3,692백만원

- 도급비 1,506,639천원, 관급비 1,649,109천원, 이전비 536,910천원

○ 도 급 자 : (주)광성이엔지 대표 이기춘

3		설계변경 사유

1	기 시공 구간 실측수량 반영(증 40.91a)

구 간	단위	수 량			비고
		당 초	변 경	증· 감(-)
걔	a	*******	*******	********
양천로1	a	******	******	********
화곡로	a	******	******	********
강서로	a	*****	*****	********
양천로2	a	******	******	********

구 간	단위	수 량			비고
		당 초	변 경	증· 감(-)
방화대로	a	******	******	********
목동로	a	*****	*****	********
목동로1	a	******	*****	********
목동로2	a	******	******	********

2	관급자재(아스콘) 단가변동 반영

구 간	단위	수 량			금 액(천원)
		당 초	변 경	증· 감	당초	변 경	증· 감
표층용 아스콘	톤	********			*********
			*******	**********		*******	**********
			*******	**********		*******	**********
			*******	**********		*******	**********
중층용 아스콘	톤	*******	*******	***********	*******	*******	**********
계		******	******		*********	*********

4	신규공종 반영 및 제경비 정산

○ 산재보험료, 고용보험료 건강보험료 등 7개 항목 제경비 정산

5	무단횡단시설 철거 및 재설치 비용 반영

○ 재포장을 위해 무단횡단금지시설 철거 및 재설치 비용은「‘22년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)에 반영하여 정산코자 함.

4		공사비 증·감 사항

구 분	설계변경 금액(원)			비고
	당 초	변 경	증· 감(-)
총 공사비	***************	***************	****************
도 급 비	***************	***************	****************
관급자재비	***************	***************	****************
이 전 비	*************	*************	****************

5		수량 증감현황

노 선 명	당 초(a)	변 경(a)	증 감(a)	비 고
걔	********	********	********
양천로1	******	******	********
화곡로	******	******	********
강서로	*****	*****	********
양천로2	******	******	********
방화대로	******	******	********
목동로	*****	*****	********
목동로1	******	*****	********
목동로2	******	******	********

6		조치계획

○ 상기 내용과 같이 책임감리자가 검토 보고한 설계변경 사항을 반영하여 설계변경 계약 후 정산 처리하고자 함

붙임 : 1. 설계변경서(1회) 1부.

2. 책임건설사업관리 설계변경 검토보고서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.