문서번호	기전과-26292
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
박건우		문동하	12/08
			이경우
협조
	주무관		문준호

『성수대교 노후 가로등주 교체공사』

설계변경 검토 보고

2022. 12.

성동도로사업소

(기전과)

『성수대교 노후 가로등주 교체공사』

설계변경 검토 보고

『성수대교 노후 가로등주 교체공사』 시행 중 물량변동이 있어 아래와 같이 설계변경을 실시하고 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 성수대교 노후 가로등주 교체공사

○ 계약금액 : ************

○ 계약기간 : 2022. 11. 1. ~ 12. 16.

○ 공사내용 : 노후 가로등주 교체

○ 계약업체 : ********************

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유

- 작업물량이 공사 추진과정 중 변동되어 물량 변경 적용(가로등주 70본→78본 교체)

- 공사원가계산서상의 각종 보험료 감액 정산

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분(총차)		계약액	변경액	증, 감	비고
도급비	공급가액	**********	**********	**********
	부가가치세	*********	*********	*********
	합계	**********	***********	**********

○ 주요 변경 내역

연번	내용	규격	변경전	변경후	비고
1	가로등주 건주	10m	70본	78본
2	가로등주 철거	10m	70본	69본
3	가로등주 재사용 철거	10m	-	9본
4	LED 가로등기구 철거설치	100W	70개	78개
5	누전차단기 설치	2P 30A	70개	78개
6	가로등 표찰 설치	STS	-	78개
7	교통표지판 이설		0	12개

□ 예산 집행계획

○ 예산현황

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기원인행위액	잔액	비고
도로시설물 노후 조명시설 개선	*******	*******	******

○ 증액된 금액은 성수대교 노후 가로등주 교체공사 낙찰차액********** 및 집행잔액*********으로 설계변경 시행

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.