문서번호	토목부-35979
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	12/08
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

설계변경( 2차 2회)검토 보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

설계변경(2차 2회)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 설계변경(2차 2회) 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

⇒ '22년 사업예산 집행률 제고를 위하여 연내 실행 가능한 공종으로 수량 및 내역 조정

□ 근   거

○ 공사 설계변경(2차 2회)검토결과 보고(보행교) - 감리부-22-01980호('22.12.08.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (2차 '21. 10. 17. ∼ '23. 10. 16.)

○ 도 급 비 :  *************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 설계변경 사유

○ '22년 사업예산 집행율 제고방안 조정회의(`22.12.6.) 결과 반영

- 연내 실행 가능한 공종으로 강교제작 등 시공수량 및 내역 조정

□ 설계변경 내역

○ 2차 2회 : 총 공사비 ***********************************

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · △감	비고
총공사비	*************	************	*
도 급 비	*************	*************	*
관 급 비	**********	**********	*
이 전 비	*	*	*
공사기간	*************************	*************************	*****

○ 주요공종 물량증·감 내역

공 종	단 위	수 량		증·감	비 고
		당 초	변 경
강교제작	톤	*****	******	**********
강교운반	톤	******	*	*********	광양→제작공장
강교가설	톤	******	*	*********
콘크리트타설	㎥	*	**	*********	교대, 교각
구조물터파기	㎥	*	*****	*********
강관말뚝박기	m	*	***	*********
쉬트파일 천공	m	*	*****	*********
가도(흘쌓기 및 헐기)	㎥	*****	*****	*********

○ 공사비 증·감 내역 ⇒ "변경없음"

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증. 감
A.보행교	*********	*********	************
1. 토공	*	*****	증) *****
2. 구조물공	*	*******	증) *******
3. 상부공	*********	*********	************
4. 가시설공	*	******	************
5. 부대공	*******	*******	************
6. 운반공	*	*	*
7. 사급자재	*	*	*
직접비 계	*********	*********	증) *******
간접비	*******	*******	************
물가상승(K1=6.76%)	*******	*******	*
물가상승(K2=3.28%)	******	******	*
물가상승(K3=3.15%)	******	******	*
제경비제외공종	******	******	증) *****
공급가액	*********	*********	*
부가가치세	*******	*******	*
도 급 액	*********	*********	*

□ 조치계획

○ 상기 검토결과와 같이 설계변경 및 변경계약을 시행하여 사업추진에

만전을 기하고자 함

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 각 1부. 끝.