문서번호	토목부-35919
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
조재근		김동철	12/08
			하현석
협조
	주무관		박희정

(제2자유로 종점부(난지도 길) 입체화 공사)

설계누락(소일 시멘트) 반영 검토보고

2022.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

(제2자유로 종점부(난지도 길) 입체화 공사)

설계누락(소일 시멘트) 반영 검토보고

가시설 복공판 외측 기존 도로의 지반 침하 방지를 위한 소일 시멘트가 도면 및 시방서에는 반영되어 있으나 설계내역에 누락되어 있어 이를 반영하기 위한 검토 보고임

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리

○ 규    모

- 지하차도 신설(폭 4차로, 연장 540m)

- 도로확폭(양방향 각 1개 차로, 총연장 582m)

○ 총공사비 : 56,069백만원(공사비 49,970, 관급비 6,099)

○ 공사기간 : '19.8.1 ~ '22.12.31

○ 시공사: 삼부토건(주), 감리사: 동부엔지니어링

□ 건설사업관리단 보고내용(제2자유로입건 제2022-424호, `22.11.29.)

○ 실정보고 사유

- 설계도면 및 공사시방서상에는 가시설 복공판 외측 기존 도로 구간의 지반 침하 방지를 위한 소일 시멘트가 반영되어 있으나

- 설계내역 및 수량산출서 상에 누락 되어 있어 반영이 필요한 실정임

※ 소일시멘트 반영 위치도

※ 소일 시멘트 반영 설계 도면

A=

1.05㎡

0.9m

0.5m

1.5m

<소일시멘트 단면>

○ 수량 변경 현황 및 신규단가 검토

공 종 명	규 격	단 위	당 초	변 경	증⦁감	비 고
소일시멘트	1:15, 두께20cm	m3	-	908	908

*****	***	***	****	****	***
*****	********	**	********	********

******************************************************

○ 공사비 검토                                       (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
**********	*	*******	*******
**********	*	******	******
**********	*	*******	*******
***********	*	*******	*******

□ 검토의견

○ 침하 방지를 위한 소일 시멘트 반영은 도면 및 시방서에 반영되어 있고 내역에는 단순 누락된 건으로,

○*************************************************************

□ 조치계획

○ 상기 실정보고 건에 대한 책임건설사업기술인의 검토 의견이 타당하다고 판단되어 추후 설계변경 시 반영 조치코자 함.

붙임 : 책임건설사업기술인 검토의견서 1부.  끝.