문서번호	도로관리과-33684
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
손창수		윤인식	12/08
			이정화
협조

물품 구매 납품기한 연기 보고

2022. 12.

안전총괄실

(도로관리과)

물품 구매 납품기한 연기 보고

2022년 겨울철 제설 종합대책 추진관련,「염수분사장치, 결빙파쇄기 구매」건의 납품기한 연기 보고임

□ 사업개요

(단위: 천원)

구 분	염수분사장치			결빙파쇄기	비 고
	이동식	소형	중형
수 량	53대	42대	23대	12대
계 약 자	즐거운미래	즐거운미래	즐거운미래	리텍(주)
계약금액	1,099,659	871,428	847,780	330,000
계 약 일	'22.12.6.	'22.12.6.	'22.12.7.	'22.11.30.
납품기한	'23.1.4.	'23.1.4.	'23.1.4.	'22.12.30.

□ 추진경위

ㅇ '22.10.31.	'22년 재난관리기금 사용계획 방침

ㅇ '22.11.10.	'22년 제14차 재난관리기금운용심의회 심의(원안가결)

ㅇ '22.11.11.	특정제품선정심사위원회 개최(서면심의)

ㅇ '22.11.16.	염수분사장치 조달구매 의뢰(다수공급자계약 2단계경쟁)

ㅇ '22.11.18.	결빙파쇄기 발주의뢰(일반경쟁입찰)

ㅇ '22.12.6.~7.	계약 체결(염수분사장치)

ㅇ '22.11.30.	계약 체결(결빙파쇄기)

□ 검토내용

ㅇ 납품기한 연기

- 계약금액 : 변동없음

- 계약기간

구 분	염수분사장치			결빙파쇄기
	이동식	소형	중형
당 초	'22.12.6.~ '23.1.4.	'22.12.6.~ '23.1.4.	'22.12.7.~ '23.1.4.	'22.11.30.~ '22.12.30.
변 경	'22.12.6.~ '23.1.31.	'22.12.6.~ '23.1.31.	'22.12.7.~ '23.1.31.	'22.11.30.~ '23.1.31.

ㅇ 연기사유

- (염수분사장치) 화물연대 파업으로 인한 레미콘 수급 지연

- (결빙파쇄기)

ㅇ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임  1. 납품기한 연기 의뢰서 4부.

2. 합의각서 4부.  끝.