문서번호	도로보수과-29045
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	도로보수과장
최원호	이상구	12/08
		代최완

『2022년 노후포장도로 노면표시 설치공사(1구역)-북부』

실정보고(2회,최종)에 따른 검토보고

2022. 12.

북부도로사업소

[도로보수과]

『2022년 노후포장도로 노면표시 설치공사(1구역)-북부』

실정보고(2회, 최종)에 따른 검토보고

『2022년 노후포장도로 노면표시 설치공사(1구역)-북부』와 관련 공사추진에 따른 작업물량 변경 실정보고임.

		관련근거

「2022년 노후포장도로 노면표시 설치공사(북부1구역) 실정보고 및 설계변경 검토건」[(주)동해종합기술공사 22-00266(2022. 12. 08.)]

		공사개요

********************************************

*******************************************

****************************************************

***************************************************************

*********************

**********************

		보고 내용

화랑로 등 5개 노선 공사물량 증·감 발생 반영

- 4종 백색실선, 황색실선, 5종 백색실선, 황색실선 등 물량 증가

- 4종 백색문자기호, 백생횡단보도, 5종 백색파선, 황색파선 등 물량 감소

		주요 변경내용

공사비 변경내역                                                   (단위: 원)

구 분	공 사 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
총 공사비	***********	***********	*************
도급비	***********	***********	*************
관급비	**********	**********	*************

주요공정 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당 초	변 경
차선도색	*********	*	******	******	********
	*******	*	******	******	********
차선제거	*	*	***	*	********
표지병 설치 및 철거	*	*	**	*	********

		조치계획

상기 보고 내용과 같이 정비물량 증·감에 따른 물량 변경분에 대하여 추후 설계변경 시 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 실정보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.