문서번호	치수과-23681
결재일자	2022.12.08
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		하천관리팀장		치수과장		재무과장		안전건설교통국장
박수한		김남천		민병기		김영규		12/08
								신용철
협조
	계약팀장		홍혜영

2022년 하천사업 건설폐기물 처리용역 설계변경(3차, 정산) 시행 검토 보고

「2022년 하천사업 건설폐기물 처리용역」

설계변경(3차, 정산) 시행 검토 보고

2022. 12.

(안전건설교통국 치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2022년 하천사업 건설폐기물 처리용역」

설계변경(3차, 정산) 시행 검토 보고

우리 구에서 시행 중인 『2022년 하천사업 건설폐기물 처리용역』의 건설폐기물 처리물량에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명: 2022년 하천사업 건설폐기물 처리용역

□ 사업기간: 2022. 3. 2. ~ 2022. 12. 31.

□ 규    모: 건설폐기물 운반 846㎥, 건설폐기물 처리 1,980톤

□ 용 역 비: 금71,126,000원

□ 계 약 자: ㈜벽성그린산업 대표 황윤남

Ⅱ		설계변경 사유

□ 2022년 하천시설물 및 자전거도로 유지보수공사 시공물량 증가에 따른 처리물량 증가

□ 새말빗물펌프장(유수지) 어린이 놀이시설 정비에 따른 신규공종 추가

Ⅲ		설계내역 변경사항

□ 주요물량 변경내역

구 분	운반(㎥)			처리(톤)
	당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
폐콘크리트	150	154.5	증) 4.5	344	355.5	증) 11.5
폐아스콘	696	696.4	증) 0.4	1,636	1636.4	증) 0.4
혼합건설폐기물	-	10.2	증) 10.2	-	8.2	증) 8.2
합 계	846	861.1	증) 15.1	1,980	2,000.1	증) 20.1

□ 용역금액 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		71,126,000	72,200,000	증)	1,074,000
도급비	공급가액	64,660,000	65,636,364	증)	976,364
	부가세	6,466,000	6,563,636	증)	97,636
	계	71,126,000	72,200,000	증)	1,074,000

Ⅳ		행정사항

□ 위와 같이 건설폐기물 처리에 대하여 물량 증·감 및 신규공종 추가 사항을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 일상감사의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 관련 방침서 1부.  끝.