등록번호

도시재정비과-11009

주무관

가재울팀장

도시재정비과장

도시재생국장

등록일자

2022.12.8.

한지형

김대중

문형도

12/08

염봉선

결재일자

2022.12.8.

공개구분

부분공개(5)

협  조

예산팀장

신해균

주무관

김태윤

- 좌원상가 임시이주상가(가설건축물) 조성 -

사고이월계획 검토보고

서 대 문 구

도시재정비과

- 좌원상가 임시이주상가(가설건축물) 조성 -

사고이월계획 검토보고

가재울9(좌원상가) 공공주도 재개발사업 중 임시영업활동을 위한  임시이주상가 설계용역이 진행중임. 이에 따라 준공기한이 미도래하여 금년도 예산을 이월하고자 함.

Ⅰ		추진근거

지방재정법 제50조(세출예산의 이월)

좌원상가 도시재생 인정사업 추진계획 [도시재생과-7703(’21.09.29.)]

좌원상가 임시이주상가 조성 설계 공모 계획 [도시재생과-10068(’21.`12.17.)]

Ⅱ		사업개요

사 업 명 : 좌원상가 임시이주상가(가설건축물) 조성

위    치 : 서대문구 남가좌동 382-12 일대

기    간 : 2021.12. ~ 2023. 12.

규    모 : 2개동, 지상3층(지상2층 1동+지상3층 1동)/연면적 1,280.77㎡

총사업비 : ***********************************

위치도 및 조감도

위치도	조감도

Ⅲ		사고이월내역

예 산 액 : ****************

이 월 액 : *********

예산상황 : **********************************

세부내역

(단위 : 천원)

예산과목						예산액	이월액	비고
부서	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목
계						*******	*******
도시 재생과	지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	도시재생 활성화	좌원상가 및 홍제 역세권 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	*******	*******

사고이월사유(미필원인행위금액 포함)

임시이주상가 조성 공사를 위한 설계용역이 현재 진행중(’22.04.18. ~

’23.03.13.)임에 따른 준공기한 미도래.

설계용역이 종료되지 아니하여 임시이주상가 공사발주도 진행되지 않음.

이에 따라 추후 진행될 공사발주에 사용될 비용의 이월이 요구됨.

임시이주상가 가설건축물 착공 지역의 문화재 지표 및 발굴(시굴)

조사 비용 예산 필요.

아울러 임시이주상가 부지 내 지장물(하수, 상수, 통신 등 7종)의 이설

비용에 지출될 예산이 필요함.

Ⅳ		행정사항

미필원인행위 금액 사전협의 : 재무과 계약팀

사고이월계획 검토 보고(방침서) 협조결재 : 기획예산과 예산팀

향후계획

************************

**************************

************************

붙   임   1. 사고이월 사업조서 1부

2. 사고이월 사업명세서 1부..

3. 근거서류(용역변경계약서) 1부.  끝.