문서번호	도로보수과-29245
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
최선보		代주영진	12/08
			김용제
협조

「2022년 노후포장도로 정비공사  폐아스콘 운반 및 처리용역(강서1구역)」

설계변경 검토 보고(제1회-최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

강서도로사업소

도로보수과

「2022년 노후포장도로 정비공사  폐아스콘 운반 및 처리용역(강서1구역)」

설계변경 검토 보고(제1회-최종)

우리 사업소에서 시행하는『노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역(강서1구역)』에 대한 책임건설사업관리용역사로부터 설계변경 검토서가 접수되어 아래와 같이 설계변경사항을 검토하여 보고 드림

※ 관련문서 : 설계변경(최종) 검토보고 동해종합기술 감리부-22-01844(2022.11.24.)

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역(강서1구역)

❍ 용역규모 : 폐아스콘 운반(처리) 17,45.92톤

❍ 용역기간 : 2022.6.3. ~ 2022.12.15.

❍ 용 역 비 : 375,210,000원

❍ 도 급 자 : 해밀환경(주) 대표 조영실

❍ 감 독 자 : ㈜동해종합기술공사, 책임건설사업관리기술자 백관현

❍ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및시설부대비, 시설비

2		설계변경사항

❍ 노후포장 공사 완료에 따른 실물량 반영

- 수량 증ㆍ감 내역                                     (단위: 톤)

구 분		당 초	변 경	비 고
폐기물 운반		*********	*********	************
폐기물 처리	평삭재	*********	*********	*************
	덩어리	******	*	************

- 공종별 증ㆍ감 내역                                   (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
폐기물 운반공		***********	***********	***************
폐기물 처리	평삭재	**********	**********	***************
	덩어리	**********	*	**************

❍ 용역비 증감 내역                                       (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	***********	***********	************

3		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 책임감리업체에서 설계변경 검토한 사항을 반영하여 설계변경후 정산 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서  1부.

2. 건설사업관리 검토보고서  1부.

3. 합의각서 1부.  끝.