문서번호	설비부-34048
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비총괄과장	설비부장
허진		代백남진	12/09
			김중영
협 조

- 양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사 -

설계변경 검토보고

2022. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

- 양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사 -

설계변경 검토보고

우리본부에서 시행중인『양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사』관련,  시공사 및 책임건설사업관리단에서 제출된 설계변경 요청에 대한 검토보고를 드림

▸ 검토내용 : 서울시설공단, 수서경찰서 요청·협의 사항 반영한 실정보고 사항 설계변경

***************************************************************

*************************************************************

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사(우선시공분)

❍ 위    치 : 대모지하차도 공사구간 (양재대로 개포1~4단지)

❍ 사업기간 : 2019.06.19. ~ 2022.12.31.

❍ 사 업 비 : *********************************

❍ 공사내용 : 가로등 144개소 이설, 철거 7개소 (총연장 L=4.1km, 지하차도 1,174m)

❍ 시 공 사 : ************************

❍ 공 정 률 : 전기(우선시공분) 70% / 주공정 26.7%

< 위 치 도 >

Ⅱ		관련근거

□ 실정보고 사항 검토보고

❍ 실정보고 사항 검토보고(설비부-32163, `22.11.15.)

- 서울시설공단 요청사항(공사구간 노후조명 개량)외 1건

❍ 횡단보도 투광기 설치 계획(설비부-32745, `22.11.23.)

- 서울수서경찰서 요청사항(구룡마을 교차로 횡단보도 2개소 투광기 설치)외 1건]

❍ 개포1단지 구간 가로등 지장물 이설 요청(동기강 2022-350, `22.12.06.)

- 대모지하차도 상부도로(수서방향) 공사구간 임시도로 및 보도 설치

Ⅲ		검토내용

□ 설계변경 내용

① 대모지하차도 공사구간 노후 조명 개량공사(시설공단 도로시설처-17224호, `22.10.11.)

- 가로등 공사 구간 조명기구 개량을 통해 적정 조도확보 및 민원 사전방지

② 구룡마을 입구 횡단보도 교통안전시설(투광기) 설치(수서경찰서 교통과-13438호, `22.11.04.)

- 공사구간 펜스 간섭 등으로 횡단보도 노면 조도 불균일 해결 및 보행자 안전 확보

③ 지장물(광역상수도 및 한전 전력구) 이설 공사에 간섭되는 기전시설물 이설·철거

- 현장여건 변동으로 원할한 지장물 이설공사 진행을 위한 이설·철거 수량 증가

	변경내용	증·감(천원)	승인문서	비고
1	노후 가로등기구(CDM, 나트륨) 121개 → LED가로등기구로 교체	**********	********* **********	****
2	지장물 이설 구간 간섭 가로등 이설·철거 수량 증가 - 가로등주 철거23, 분전반 이설2, 투광등주 이설1 등	*********		*****
3	구룡마을 입구 횡단보도 투광등 설치 - 횡단보도 2개소에 LED 투광등기구 4개 설치	********	********* **********	*****
4	지장물 이설 구간 간섭 투광등주 이설 등 - 투광등주 1본 추가	******		*****
합 계 (직접비)		********	*************

□ 공사비 변동내용

❍ 도급공사비 증감현황 : *************                     (단위: 원)

비 목		구 분	변경 전	변경 후	증.감
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비	**********	**********	*********
		간 접 재 료 비	*	*	*
		작업설.부산물등	*	*	*
		소 계	**********	**********	*********
	노무비	직 접 노 무 비	**********	***********	**********
		간 접 노 무 비	**********	**********	*********
		소 계	***********	***********	**********
	경비	기 계 경 비	*********	*********	*****
		산 재 보 험 료	*********	*********	*********
		고 용 보 험 료	*******	*********	*******
		건 강 보 험 료	*********	*********	*
		연 금 보 험 료	*********	*********	*
		안 전 관 리 비	*********	*********	*
		기 타 경 비	**********	**********	*********
		노인장기요양보험	*******	*******	*
		소 계	**********	**********	*********
일 반 관 리 비			**********	**********	*********
이 윤			*********	*********	*******
공 사 가 액			***********	***********	**********
부 가 가 치 세			**********	**********	*********
도 급 비			***********	***********	**********

□ 공사기간 변경내용

❍ 개포1단지(광역상수도 및 한전전력구 이설공사 구간), 구룡마을 교차로 임시보도 및 도로설치계획에 따라 `23.01.~`23.02. 토목 성토작업에 간섭되는 가로등 이설 및 재설치 작업을 수행하기 위한 공기연장 필요

- `23.01. ~ 02. : 임시 부도로 성토작업, 지장 가로등 이설

- `23.03. ~ 04. : 임시 부도로 조성 후, 가로등 복구

*******************************************************

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경
총차	2019.06.19.~2022.12.31.	2019.06.19.~2023.04.30.	증 120일

Ⅳ		검토의견 및 향후계획

□ 감리단 검토의견

❍ 상기 검토 내용과 같이 양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사 설계변경(6회)를 검토한 결과, 투광기 설치 및 가로등 개량 관련 기 승인된 실정보고의 내용대로 적정하게 반영되었으며, 대모지하차도 개포1단지 토목공사(수서방향 시점부 성토작업 및 임시부도로 조성)로 인해 간섭되는 가로등 이설 및 복구작업이 필요하므로 120일 공기연장은 적절함

□ 보고자 의견

❍ 책임건설사업관리단의 검토의견서와 같이 서울시설공단, 서울수서경찰서
요청사항 등으로 발생한 실정보고 승인사항 내용이 잘 반영된 설계변경 건으로 계약변경을 진행하는 것이 타당하다고 사료되며, 향후 원할한 임시부도로 설치 및 지장물 공사진행을 위해 계약기간 120일 연장요청 또한 적절함

□ 향후 계획

❍ `22.12. : 계약변경 의뢰(총무부)

❍ `23.04. : 공사 준공

붙 임 1. 책임건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 지장물 이설요청 공문 1부.

3. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.