아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	『2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사(장기2차)』 준공기한 연기 요청

1. 우리 정수센터에서 시행 중인 『2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사(장기2차)』와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 및 예산 사고이월을 요청합니다.

가. 준공기한 연기

건명	계약업체	준공기한
		변경전	변경후
********************** ******	*****	***********	***********

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 중국내 코로나 확진자 수 증가한에 따라 활성탄 생산도시 봉쇄로 인하여 석탄 운반 및 생산이 이루어지지 않아 국내 반입이 지연되고 있어 입상 활성탄(신탄) 납품일정 변경되어 공사 준공기한 순연

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서, 변경합의서 각 1부.

2. 방침서 1부.  끝.

	정 수 시 설 과 장
주무관	정상수		정수시설과장	12/09
代전준원
협조자	주무관	장현순
시행	정수시설과-26177	(	2022.12.09	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, 뚝도아리수정수센터 정수시설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5577	/전송	02-3146-5506	/	minjisarang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)